문서번호	급수운영과-3089
결재일자	2021. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		중부수도사업소장
성영한	이훈재	채재일		02/15 김정애
협 조
	주무관		이연한

중구 을지로 대형 불용관(D=600mm) 정비계획

2021. 2.

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

중구 을지로 대형 불용관(D=600mm) 정비계획

2020. 12. 19. 중구 을지로2가사거리 앞 누수복구에서 발견된 사용하지 않는 대형 불용관(D600mm)을 정비하고자 세부 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		현 황

□ 근거

○ 2021년 불용관 정비계획(누수방지과-9547호, 2020. 12. 29.)

- 과년도 미정비 불용관 집중 정비

(지하 장애물의 간섭 등으로 인한 지난 연도 미정비한 불용관 정비 추진)

	불용관 개요
· 불용관: 향후 사용계획이 없거나 사용이 불필요한 수도관은 분기점에서 폐쇄하여야 하나, 폐쇄하지 않아 관말로 남아 있는 수도관((’89년 이전 노후관)

□ 발생 경위(누수복구 현황)

○ 위치: 중구 을지로2가 88-5호 신한L타워 앞(을지로2가 사거리)

○ 구경(관종): D600㎜〔CIP, 연도 미상: 대현산배수지 (구)배수관로 추정〕

○ 일시: 2020. 12. 14.

- 1차 복구: 12.17.(목) 21:30~다음날 05:00

물 따라나옴으로 작업 중단

· 을지로2가사거리(삼일대로 방향)앞 중앙차선방향 3개 차선을 굴착하였음에도 물 따라 나옴으로 추적굴착이 곤란하여 복구 중단

- 2차 복구: 12.19.(토) 21:00~다음날 05:30, 복구완료(마개플랜지 설치)

○ 누수원인: 불용관(D600㎜)에 의한 누수

- (구)대현산배수지 배수관로의 분기밸브(위치불명)가 고무패캥 노후 등으로 완전 지수되지 않아 발생한 누수 추정

Ⅱ		추진 계획

□ 불용관 현황

위 치	발생일	관종	구경	공사내용	비고
을지로2가 88-5	20.12.14	CIP	600	마개플랜지 접합	누수복구적출

□ 정비 방법

1. 정비 방향:

을지로2가 사거리 → 시청 간

2. ①차 굴착, 횡단굴착(2개 차로) 실시, 유로방향 확인

- 굴착 부 기존관 전량 철거, 맹판 설치(전, 후 2개소 _ 침하방지)

- 굴곡점을 조사한 후, 터파기하여 무분별한 굴착 지양

3. ②, ③차 굴착, 횡단굴착(2개 차로) 실시, 유로방향 확인

- 굴착 부 기존관 전량 철거, 맹판 설치(전, 후 2개소 _ 침하방지)

4. 최종 굴착, 배수본관 분기점 폐쇄 조치, 맞이음 처리

- 단수 수반 시, 사전 수계전환 실시

※ 간선도로 굴착 구간은 즉시 포장복구의뢰 복구 조치(당일 복구)

□ 추진 일정

○ ’21. 1. 18...... 도로굴착사업계획서 제출(중구청 도로시설과)

○ ’21. 2. 16...... 대형 불용관 정비계획 보고(본부 누수방지과)

○ ’21. 3월초 ...... 도로굴착승인 요청 및 유관기관 협의

○ ’21. 3월   ...... 관급자재 구매 및 안전시설 조치방안 강구

○ ’21. 4월초 ...... 불용관 정비 작업지시(지역내 단가계약업체)

- 위치: 중구 을지로2가 88-5(을지로2가사거리)~ 을지로1가 16

(시청삼거리), 을지로

- 개요: 구경 600mm 연장 730m(추정), CIP(연도 미상)

- 기간: 2020. 4. 1. ~ 6. 30.

- 예산: 30백만원(시설비_불용관 정비)

- 공사의 시급성을 감안, 「중구관내 상수도공사(단가계약)」작업지시

○ ’21. 6월말 ...... 불용관 정비공사 완료 예정(본부 조치결과 보고)

Ⅲ		행 정 사 항

□ 대형 불용관 정비 계획 보고: 본부 누수방지과(검토승인 후 실시)

□ 도로굴착, 자재구매 등 사전 협의 및 준비 조치.

붙임  1. 누수복구 완료 및 동향 보고 각 1부.

2. 불용관 정비 관련 공문 각 1부.  끝.