문서번호	재생정책과-2030
결재일자	2021. 2. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		재생전략팀장	재생정책과장
조영진		신윤철	02/16 김규룡
협 조

Y밸리 스마트시제품(스마트가로등) 제작지원 용역 -

준 공 기 한  연 기 보 고

2021. 2.

도시재생실

재생정책과

-Y밸리 스마트시제품(스마트가로등) 제작지원 용역 -

준 공 기 한  연 기 보 고

Y밸리 스마트시제품(스마트가로등) 제작지원 관련 주민협의 및 제품제작 기간확보를 위한 추가 과업기간이 필요하여 다음과 같이 보고드림.

□ 추진근거

○ 스마트시제품(스마트가로등) 제작 지원사업[재생정책과-12033(`20.9.4)]

□ 사업개요

********************************

*********************************

***********************

******************************

*********

*****************************

****************************************

******

**************************************

********

○ `20.10.26. : 용역계약 및 착수

○ `20.10.30. : 스마트 가로등 기획회의(1차)

○ `20.11.11. : 스마트 가로등 기획회의(2차)

○ `20.11.25. : 스마트 가로등 기획회의(3차)

○ `21.02.02. : 스마트 가로등 기획회의(4차)

*******

*******************************************

***************

***************

**************

*************

****************************************

************************

**	****	*****	*****	** **	**	****	*** ***	*****	******
***	** **	** **	** **	***	** **	***	** **	** **	***

**************************************

□ 향후계획

○ `21.  2.        : 변경계약 요청(재무과)

○ `21.  2. ~ 7.  : 제작 및 설치. 끝.