문서번호	전산정보과-1921
결재일자	2021. 2. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
정은화		신경숙	02/17 장화영
협 조

Seoul Water 스마트 상황실(2단계) 구축 사업

S/W개발 사업기간 산정위원회 개최 결과보고

2021. 2.

요금관리부

(전산정보과)

Seoul Water 스마트 상황실(2단계) 구축 사업

S/W개발 사업기간 산정위원회 개최 결과보고

「Seoul Water 스마트 상황실(2단계) 구축」사업을 진행함에 있어 관련 규정에 따라 적정 사업기간 산정위원회를 개최하여 본 사업의 소요기간을 산정하였음

Ⅰ		추진근거

□ 정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법 제23조

(공공부문 소프트웨어 사업의 합리화)

관계 중앙행정기관, 지방자치단체 또는 공공기관의 장은 소프트웨어사업을 발주할 경우 사업수행에 필요한 적정 사업기간을 산정하여야 함

□ 소프트웨어 사업 관리감독에 관한 일반기준 제6조(적정사업기간의 산정)

①발주자는 소프트웨어의 개발과 관련된 사업의 경우 소프트웨어 개발사업의 적정사업기간 산정기준을 활용하여 사업수행에 필요한 적정 사업기간을 산정하여야 한다.

②발주자는 적정 사업기간을 산정하기 위하여 산업계․학계․연구계․국가기관등의 소속공무원 등 해당분야 전문가로 구성된 전문위원회를 위원장을 포함한 7인 이내의 위원으로 구성․운영할 수 있다

③위원회는 별표3 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 산정기준에 따라 적정 사업기간을 산정하고 별지 제2호 서식 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 위원별 산정서, 별지 제3호서식 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서 및 별지 제4호 서식 서약서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.

④발주자는 1항부터 3항까지의 규정에 따라 적정 사업기간을 산정하여 사업을 발주하는 경우 입찰공고문, 제안요청서 등에“ ”소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 산정 기준에 따른 사업“임을 명시

□ Seoul Water 스마트 상황실 구축(2단계)기본계획

[전산정보과-13703(2021.1.6.)]

□ S/W사업기간 산정위원회 구청 및 운영계획[전산정보과-1633(2021.2.5.)]

Ⅱ		사업개요

□ 사 업 명 : Seoul Water 스마트 상황실 구축(2단계)

□ 사업기간 : 계약일로부터 9개월

□ 사 업 비 :**********

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

※지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제44조

□ 주요사업내용

- 스마트 상황실 1단계 시스템의 업데이트를 위한 추가 분석 및 개발

**		*******	**********
*********	**	********** ********* ********* *********	****************** *********** ******************* ************** ************************ *************** **************
	**	*****	****************
	**	*****	******************** ************ *****************
	**		*********
****	**	**********	***********
	**	*********** **************	************ *****
****		****** ****** ******	***************
****		*************	***************** *****************

****		***************	*****************
***		***********	************* *******************
**	****	*************	******
	****	*********	******************** ******** ********************
***	****		************** ************* ******************** ************************ ***************************
***		*************	*********************** *******

□ 각 부장실 및 내부 직원의 공유를 위한 모니터(PC)버전 플랫폼 개발

□ 데이터 공동 활용을 위한 메타 표준관리 및 배포, 시각화 변경 지원

□ 스마트 상황실의 정상적인 운영을 위한 주요기능 실시간 점검

□ 반영기술(음성명령) 안정화 및 신규(모션인식 등) 적용을 통한 사용성 개선

□ 현장차량 실시간 영상 관제시스템과의 연계 메뉴 추가 개발

□ 위치기반 공사현장 동영상 자료 및 GIS 연계구현 등

□ 운영서버 구입 및 소프트웨어(백업 및 윈도우서버 등) 6종 구입

Ⅲ		사업기간산정방법

□ 용역기간 산정 방법

□ 산정 방법 : 소프트웨어사업정보저장소에서 제공하는 추정기간과 서울시 및 유사사업의 사업기간을 산정위원회에 회부하여 심의 결과에 따라 적정 사업기간 결정

□ 발주자가 사전 조사한 자료를 검토하여 적정 사업기간 산정

- 발주자의 사전 조사 산정기간 : 9개월

- 사업기간 산정 검토 기준 : 기능점수(FP), 사업기초자료, 유사사업 등

□ 용역기간 심의 결과

- 추정기간과 유사사업기간을 비교하여 위원들이 사업적정기간을 산정하고 위원들의 다수 의견 등을 참조하여 위원장이 최종 결정

□ 산정위원회 구성

*******************************

******************************************

********************

**********

*************************************

***********************************

***********************************

************************************

*********************************

***************************************

□ 산정위원회 개최내용 및 결과

□ 내용

- 산정방법 : 발주자의 사전조사 자료를 검토하여 적정 사업기간 산정

- 검토항목 : 기능점수(FP)+투입공수, 사업기초자료, 유사사업, 기타특이사항

□ 산정결과

- 사업기간 산정위원회 사업기간 종합 검토 내용

검토항목	발주자 사전조사자료	위원회 검토의견	추정사업기간
기능점수(FP)+ 투입공수기반	9개월	기능점수 및 투입공수 기반으로 산출한 개발기간이 적정함	7.5개월
사업기초 자료	7.5개월	사업기초자료를 토대로 검토한 결과 사업기간이 적정함	9개월

검토항목	발주자 사전 조사자료	위원회 검토의견	추정사업기간
유사사업 자료	7.25개월	담당자가 조사한 유사사업 자료 또한 적절하게 산출되었음	8.3개월
기타 특이 사항		타시스템과 연계 및 대시민 공개 콘텐츠 개발을 고려할 때 사업기간이 적적함	9개월
종합의견	7.25개월	다양한 시스템과 연계하여 예측과 분석콘텐츠를 개발하고 데이터 공공활용등을 고려할 때 충분한 사업기간이 필요하다고 판단	8.5개월

- 스마트 상황실 구축 사업은 1단계 사업의 연장선으로 실시간 예측 및 분석을 위한 시스템 구축 사업이며

- 또한 직원 서비스를 위해 PC용 플랫폼을 구축하여 내부 행정시스템의 연계자료를 실시간 서비스 하는 사업으로서 분석 및 DB구축등 다양한 요소가 포함되어 있고 향후 디지털 시민시장실 서비스 및 데이터 공동 활용을 위한 메타 표준관리 등 분야가 광범위하여 구축 및 검증기간이 많이 소요될 것으로 판단되어

- 본 사업은 투입공수로만 사업기간을 산정하기에는 적절하지 않다고 판단됨

- 적정사업기간 : 9개월

********************************************

**********************************

**********************

**************************

******************************