문서번호	누수방지과-1864
결재일자	2021. 2. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설관리부장
김영혁		김형준	02/17 강호광
협조

안전사고 예방을 위한 현장방문 결과보고
안전사고 예방을 위한 현장방문 결과 보고(수도자재관리센터)

2021. 2.

시설관리부

누수방지과

안전사고 예방을 위한

현장 방문 결과 보고(수도자재관리센터)

수도자재관리센터의 업무 추진사항 및 안전사고 예방을 위한 현장을 방문하고 그 결과를 보고드림

□ 방문개요

○ 방 문 자 : 시설관리부장외 2인

○ 방 문 일 : 2021. 2.15.(월)

○ 주요 확인내용

- 수도자재관리센터 업무추진사항 및

안전관리실태 등

□ 방문결과

○ 안전관리분야

- 수도자재관리센터 방문자에 대하여 철저한 코로나19방지를 위한

단계별 준수사항 이행

- 자재 승·하차를 위한 지게차 운전시 안전에 유의하여 운행

- 직원에 대한 안전관리교육 철저 (월 1회)

- 자재관리 철저 (직관 및 이형관에 대한 관마개 씌우기)

○ 수도자재관리센터 애로사항

- 필요한 자재에 대하여 출고 최소 소요기일을 준수하여 자재수급에 문제가 없도록 공사부서에 적극 협조 요청

(계약심사 완료 후 바로 자재구매가 필요함)

- 불가피한 설계변경 등으로 긴급자재가 필요하여 구매요구시 사전에 자재센터와 출고일자 등 협의

※ 자재별 출고 최소 소요 기일

품 목	규 격	출 고 가 능 최 소 기 일	비 고
덕타일 주철관(이형관)	80 ~ 1,100mm	50일	조달구매
밸 브 류	80 ~ 2,600mm	50일	조달구매
철 개 류	각 종	50일	“
압 륜 류	80 ~ 1,100mm	50일	“
계량기 보호통 류	15 ~ 50mm	50일	“
폴리에틸렌 피복강관류	D400 ~ D3,000mm	70일	공개경쟁

- 적정량 구매 및 출고를 통해 반납자재가 최소화 될 수 있도록 공사부서에 협조 요청

※ 주요 품목 출고 수량 144,155개 대비 반납수량 16,410개로 11.4% 반납(2020년 기준)

· 잘 사용되지 않은 자재(강관류 및 900㎜이상 대형자재 등)는 반납자재 발생 예상시 자재관리센터에서 계약변경(수량) 할 수 있도록 최소 1개월 전에 사전 통보

□ 기타 행정사항

○ 수도사업소 : 공사부서에 출고 최소 소요기일 준수 및 반납자재가 최소화 될 수 있도록 협조 요청

○ 수도자재관리센터 : 방문결과에 따른 조치사항 안내. 끝.