문서번호	시설보수과-1360
결재일자	2021. 2. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
오광준		代오광준	02/17 고영준
협조

『장월교 개축공사 실시설계용역외 1건』

준공기한 연기 검토 보고

2021. 2.

북부도로사업소

(시설보수과)

『장월교 개축공사 실시설계용역외 1건』

준공기한 연기 검토 보고

『장월교 개축공사 실시설계용역』과 『장월교 개축공사 실시설계용역 건설사업관리(설계감리)용역』에 대해서 건설기술심의, 공공디자인진흥위원회심의, 설계안정성검토 등 사전절차 이행에 따른 과업기간 부족으로 인한 준공기한 연기보고 임.

관련근거

○ 장월교 개축공사 실시설계용역 준공기한 연기보고

(에이스톤 2021-13;2021.2.16.)

용역현황

1. 실시설계

○ 용 역 명 : 장월교 개축공사 실시설계용역

○ 용역개요 : 실시설계 1식

○ 용역기간 : 2020.03.16. ∼ 2021.2.28.

○ 용 역 비 : 금198,681,000원

○ 계 약 자 : ㈜동해종합기술공사 대표자 정점래

2. 건설사업관리(설계감리)

○ 용 역 명 : 장월교 개축공사 실시설계용역 건설사업관리(설계감리)용역

○ 용역개요 : 건설사업관리(설계감리) 1식

○ 용역기간 : 2020.11.23. ∼ 2021.2.20.

○ 용 역 비 : 금61,369,000원

○ 계 약 자 : 에이스톤엔지니어링㈜ 대표자 이영순

보고내용

○ 준공기한 연기 사유

- 건설기술심의, 공공디자인진흥위원회심의, 설계안정성검토 등 사전 절차 이행에 따른 과업기간 부족

○ 준공기한 연기

1. 실시설계

- 당 초 : 2020.03.16. ~ 2021.2.28.

- 변 경 : 2020.03.16. ~ 2021.04.15.(증46일)

- 지체상금 부과 여부 : 미부과(※귀책사유-서울시)

2. 건설사업관리(설계감리)

- 당 초 : 2020.11.23. ~ 2021.2.20.

- 변 경 : 2020.11.23. ~ 2021.04.15.(증54일)

- 지체상금 부과 여부 : 미부과(※귀책사유-서울시)

조치계획

○ 상기 보고 내용과 같이 준공기한을 연기하여 내실있는 용역을 추진 하고자 함.

붙임 : 1. 준공기한 연기 공문(설계감리사) 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 각 1부.

3. 합의 각서 각 1부.  끝.