투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
(경유)
제목	설계변경 계약심사 요청(중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사)

우리본부에서 시행중인 ‘중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사’ 관련, 설계변경을 진행하고자 아래와 같이 계약심사 요청하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

1) 위치: 서울특별시 성동구 자동차시장3길64 중랑물재생센터

2) 기간: 2017.11.20. ~ 2021.03.31. (3차: 2020.01.16. ~ 2021.03.31.)

3) 규모: 총인처리시설 A▪B동, 유입펌프, 약품투입시설, 소방 및 건축설비공사

나. 설계변경 금액                                                   (단위: 천원)

구분	총차	3차	비고 (증액)
당초	*********	*********	********
변경	*********	*********

다. 설계변경 사유: 종합시운전 시행과정에서 도출된 시설보완사항 반영

라. 관련근거: 서울특별시 계약심사 업무처리 규칙 제3조 제5호

- 계약금액이 20억원 이상 공사의 설계변경에 따른 1회 증액분 또는 2회 이후 누적 증액분이 당해 계약금액의 10% 이상인 설계변경 공사

붙임: 1) 설계변경 심사요청서 1부

2) 설계변경 계약심사 검토보고(건설사업관리단) 1부

3) 실정보고 검토보고서 1부

4) 도면, 내역서, 산출서 등 심사 필요서류(별도송부) 1부  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	양우창		열빛총괄과장	代박경철		설비부장	02/17 김중영
협조자
시행	설비부-2165	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8605	/전송	02-3708-8659	/	yang7931@seoul.go.kr	/	부분공개(5)