문서번호	도로보수과-1502
보존기간	년
결재일자	2021. 2. 18.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
최완		이화신	02/18 고영준
협조	주무관		이상구
	주무관		박세근

2021년 노후포장도로 정비공사 추진 계획

『안전하고 쾌적한 포장도로 유지관리를 위한』

’21년 노후포장도로 정비공사 추진계획

2021. 2.

북부도로사업소

[도로보수과]

2021년 노후포장도로 정비공사 추진 계획

『안전하고 쾌적한 포장도로 유지관리를 위한』

’21년 노후포장도로 정비공사 추진계획

Ⅰ		관 련 근 거

□ ’21년 노후포장도로 정비공사 예산 재배정 통보

○ 도로관리과-1054호(2021.1.20) : ’21년 노후포장도로 정비공사 추진계획

⇒ 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 노후포장도로    정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 노후포장도로 예산 재배정 현황               (단위 : 백만원)

구분	합 계	노 후 포 장	긴 급 복 구	맨 홀 정 비	친환경 포 장	PC 콘크 리트포장	노 면 표 시	감리비	기 타 (재료비 등)
금액	12,405	7,326	1,811	1,059	200	540	760	570	139

Ⅱ		추 진 방 향

□ 아스팔트 포장 시공품질 향상

○ 아스팔트 포장 공용수명 증대

- 1등급 골재 사용 및 버스차로 고내구성(개질SMA, PG76-22) 포장

○ 아스팔트 생산 및 현장시공 관리감독 강화

- 합동점검 : 외부전문가, 서울시 도로관리과, 품질시험소, 사업소

- 시공 현장 및 아스팔트 플랜트 공장 점검 : 책임감리원, 품질감리원

□ 노후포장도로 정비공사 예산집행 : 상반기 50% 이상

○ 선금 및 공사기성금 지급 등을 통해 조기집행 목표달성 집중추진

Ⅲ		세 부 추 진 계 획

□ 노후포장도로 사업별 예산 배분

사 업 명	구 분	예산(백만원)	비 고
합 계		12,405
노후포장도로 정비공사	1 구역	3,663	노원·도봉·강북구 관내
	2 구역	3,663	종로·성북구 관내
긴급복구공사		1,811	야간출동(238) 미포함 공동복구(73) 미포함
불량맨홀 정비공사		1,059	신기술 공법
친환경 포장	결빙방지 포장	200	서울시 특정기술선정심사 실시
PC콘크리트포장	버스 정류장	540	서울시 특정기술선정심사 실시
노면표시 유지관리	노면표시 설치비, 도면제작비, 감리비	760	노면표시 감리비(100) 별도 도면제작비 용역비 포함
건설사업관리 용역	포장,굴착,맨홀 감리비	570	포장,맨홀 감리비(570) 포함 굴착 감리비(500) 미포함
기타예산	사무관리비 공공운영비 재 료 비	139	직영장비 유류비·수리비 상온·가열아스콘 구매 직영 노후장비 교체구매

□ 노후포장도로 정비공사 추진 계획

○ 1,2구역으로 분할하여 시행 : 공사 집중에 따른 시공지연 방지

1구역	4개 노선	일반도로 : 노원로, 화랑로, 마들로 버스차로 : 화랑로, 도봉로
2구역	8개 노선	일반도로 : 한천로, 노해로, 화랑로, 월곡로, 창경궁로, 자하문로, 덕릉로 버스차로 : 창경궁로, 종로

○ 2021년 노후포장도로 정비공사 구역별 발주

1) 2021년 노후포장도로 정비공사(1구역) - 북부

① 입찰방법 : 일반경쟁입찰

② 입찰참가 자격

가. 입찰참가신청 서류접수 마감일 기준으로 건설산업기본법 제8조 및 같은법 시행령 제7조의 규정에 의한 전문건설업 중 포장공사업 등록업체 또는 종합건설업중  토목공사업(토목건축공사업 허용) 등록업체

나. 주된 영업소의 소재지가 서울특별시 이외인 업체는 입찰공고일 전일부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 서울특별시 소재 포장공사업 등록업체와 공동도급(공동이행방식)으로 계약체결하여야 하며, 서울특별시 소재 업체의 최소 시공참여비율은 공사금액의 49%이상으로 함. 공동수급체 구성원 수는 5개사 이하로 하며, 구성원별 계약참여 최소지분율은 5% 이상으로 함.

다. 지역의무 공동도급에 따라 공동수급체를 구성하는 경우 해당 지역업체와 그외 지역업체 간에는 ‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’에 따른 계열회사(상호출자제한기업집단 소속 계열회사를 말한다)가 아니어야 함.

③ 사업개요 : 절삭후 덧씌우기(t=5cm 168a, t=10cm 562a)

④ 사업기간 : 착공일로부터 ~ 2021.12.31일까지

⑤ 사 업 비 : 3,663백만원 [도급비 1,154, 관급비 1,499, 이전비 1,010]

2) 2021년 노후포장도로 정비공사(2구역) - 북부

① 입찰방법 : 일반경쟁입찰

② 입찰참가 자격

가. 입찰참가신청 서류접수 마감일 기준으로 건설산업기본법 제8조 및 같은법 시행령 제7조의 규정에 의한 전문건설업 중 포장공사업 등록업체 또는 종합건설업중  토목공사업(토목건축공사업 허용) 등록업체

나. 주된 영업소의 소재지가 서울특별시 이외인 업체는 입찰공고일 전일부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 서울특별시 소재 포장공사업 등록업체와 공동도급(공동이행방식)으로 계약체결하여야 하며, 서울특별시 소재 업체의 최소 시공참여비율은 공사금액의 49%이상으로 함. 공동수급체 구성원 수는 5개사 이하로 하며, 구성원별 계약참여 최소지분율은 5% 이상으로 함.

다. 지역의무 공동도급에 따라 공동수급체를 구성하는 경우 해당 지역업체와 그외 지역업체 간에는 ‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’에 따른 계열회사(상호출자제한기업집단 소속 계열회사를 말한다)가 아니어야 함.

③ 사업개요 : 절삭후 덧씌우기(t=5cm 454a, t=10cm 437a)

④ 사업기간 : 착공일로부터 ~ 2021.12.31일까지

⑤ 사 업 비 : 3,663백만원 [도급비 1,302, 관급비 1,539, 이전비 822]

□ 사업별 발주 및 착수

○ 사업별 발주 시행

- 노후포장정비(1,2구역) : 일상감사의뢰 및 결과통보후 공사 발주

- 노면표시유지관리(2월내), 불량맨홀정비(3월내) 공사 발주

※ 조기발주 : 긴급복구공사(2021년 1월 공사계약 및 사업착수)

※ 2021년 한시적 계약심사 제외 목록

⇒ 노후포장도로 정비공사, 맨홀정비공사, 폐아스콘 처리 용역

○ 친환경(결빙방지) 포장 및 PC콘크리트포장 추진

- 서울시 도로관리과에서 특정기술선정심사위원회 통합 추진(3~4월)

- 심사대상 : 친환경포장(200백만원), PC콘크리트포장(540백만원)

※ 서울시 도로관리과 특정기술선정심사위원회 결과 통보후 추진

○ 사업별 실공사 착수

- 노후포장도로(1,2구역), 불량맨홀정비, 노면표시 : 3월 ~ 4월

□ 품질관리 철저

○ 품질시험 강화

- 선정시험(재료)        : 아스콘 납품회사별 시험 실시

- 혼합물 관리시험(재료) : 1일 30a 이상 정비시 시험 실시

- 시공관리시험(코아)    : 30a마다 코아 채취후 시험 실시

○ 혼합물 생산과정 및 시공현장 감독 철저

- 플랜트 점검 및 공사현장에 책임감리 상주 등 관리감독 철저

○ 포장분야 품질확보 및 청렴성확보를 위한 교육 실시

- 교육일시 : 공사 및 자재업체 확정후 (3~5월)

·  아스콘 생산업체, 시공업체 및 책임감리단과 간담회 개최

Ⅳ		향 후 계 획

○ ’21. 2 : 공사 일상감사 및 계약심사 의뢰 및 심사결과후 발주

○ ’21. 3 ~ 12 : 공사계약 및 포장공사 시행, 준공처리

붙임  1. 2021년 노후포장도로 정비공사(1,2구역) 설계도서 1부.

2. 2021년 정비공사계획 위치도(1,2구역) 1부.  끝.