등록번호

푸른도시과-3045

주무관

공원기획팀장

푸른도시과장

안전건설교통국장

부구청장

구청장

등록일자

2021.2.17.

박빈영

김계영

송행국

이경우

서영관

02/18

문석진

결재일자

2021.2.18.

공개구분

대시민공개

협  조

스마트정보과장

김용신

정보기획팀장

이광명

토목과장

강우균

도로관리팀장

김균성

홍보과장

이원중

생태경관 보행구역 조성사업 추진계획

서 대 문 구

푸른도시과

생태경관 보행구역 조성사업 추진계획

우리구 4개산 보행길이 일부 단절되어 산과 홍제천을 연결하고 통일된 안내체계를 보완하여 이용객들이 4개산을 하나의 보행구역으로 인식하도록 조성하고자 함

Ⅰ

사 업 개 요

❚ 위    치 : 인왕산~홍제천~북한산~백련산~홍제천~안산

❚ 규    모 : 연장 20.5km

❍ 인왕산 3km, 북한산 4.5km, 백련산 2.5km, 안산 7km, 홍제천 3.5km

❚ 사업기간 : 2020. 4. ~ 2021. 10.

❚ 사업주체 : 區 자체사업 / 市 보조사업

❚ 사업내용

❍ 4개산과 홍제천을 연결하여 순환하는 생태경관 보행구역 조성

(인왕산~홍제천~북한산~백련산~홍제천~안산 non-stop 보행네트워크 조성)

❍ 생태경관 보행구역 안내체계 구축

(안내판 디자인을 통합·정비하여 시인성 확보)

❍ 생태경관 보행구역 가상공간 구축

(사계절 보행구역 촬영 및 QR코드 설치로 언택트 가상공간 체험)

※ 카카오맵 로드뷰 연계방안 모색

❚ 사 업 비 : 총 2,281백만원 (시비 931, 구비 1,350)

❍ 인왕산~홍제천~북한산 / 백련산~홍제천~안산 연결 (구비 1,060)

❍ 생태경관 보행구역 가상공간 구축             (구비   240)

❍ 북한산~백련산 연결                        (시비   500)

❍ 인왕산 둘레길 조성                          (시비   431/ 구비 50)

Ⅱ

세부추진계획

❚ 사 업 구 간 : 4개구간 4.4km

❍ 인왕산(홍지문배수지)~홍제천~북한산(옥천암) 연결 0.3km

❍ 북한산(자락길)~백련산(산골고개 생태연결로)연결 0.3km

❍ 백련산(논골지구)~홍제천(힐튼호텔) 연결 0.8km

❍ 인왕산둘레길(무악재하늘다리~홍지문배수지) 3.0km

[ 구비사업 - 3건 ]

1. 생태경관 보행구역 기본 및 실시설계용역

❍ 추진방향

- 4개산(인왕산~북한산 / 북한산~백련산 / 백련산~안산) 단절구간 연결방안 수립

- 자락길, 등산로, 홍제천 주변 주요시설 일제조사(노면상태, 안내판 등)

- 통일성 있는 보행길 조성 및 안내체계 구축

❍ 추진일정 : 2021. 2. ~ 5.

❍ 추진방법 : 일반경쟁입찰 (60백만원-구비)

2. 생태경관 보행구역 조성공사

❍ 추진방향 : 기본계획을 바탕으로 공사 시행

- 4개산(인왕산~북한산 / 북한산~백련산 / 백련산~안산) 단절구간 보행길 조성

- 백련산 등산로 신설, 자락길 및  등산로 정비 등

❍ 추진일정 : 2021. 7. ~ 10.

❍ 추진방법 : 일반경쟁입찰 (1,000백만원-구비)

3. 생태경관 보행구역 가상공간 구축

❍ 추진방향

- 카카오맵 연계 (2014년 계룡산 3차원 탐방체험서비스 시행-카카오맵)

- 서대문구 홈페이지 리뉴얼 (3차원 가상공간 서비스제공)

- QR코드 설치 등 핸드폰 연동 서비스 제공

❍ 추진일정 : 2021. 6. ~ 10.

❍ 추진방법 : 일반경쟁입찰 (240백만원-구비)

[ 시비사업 – 2건 ]

1. 인왕산 둘레길 조성사업

❍ 사업구간 : 연장 3.0km (무악재 하늘다리~홍지문배수지)

❍ 사 업 비 : 481백만원(시비 431 / 구비 50)

❍ 사업기간 : 2020. 4. ~ 2021. 7.

❍ 사업내용 : 개미마을 뒤편 등산로 신설, 인왕산 둘레길 및 시설물 정비 등

2. 북한산 ~ 백련산 연결사업

❍ 사업구간 : 연장 0.3km (북한산 자락길 ~ 백련산 산골고개 생태연결로)

❍ 사 업 비 : 500백만원(시비)

❍ 사업기간 : 2021. 1. ~ 7.

❍ 사업내용 : 등산로 신설

Ⅲ

행 정 사 항

❚ 홍   보   과 : 생태경관 보행구역 홍보(언론사, 구보, 홈페이지 등)

❚ 스마트정보과 : 생태경관 보행구역 가상공간 구축 관련 설계 협의

❚ 토   목   과 : 홍지문배수지~북한산 자락길(옥천암) 단절구간 보행자 안전조치 등 검토․추진

Ⅳ

추진실적 및  계획

❚  2020.   4.              : 인왕산 둘레길 조성사업 추진계획 수립(市)

❚  2020.  12. ~ 2021. 7. : 인왕산 둘레길 조성사업 시행

❚  2021.   2. ~  6.        : 생태경관 보행구역 기본 및 실시설계 시행

❚  2021.   7. ~ 10.       : 생태경관 보행구역 조성사업 시행 및 가상공간 구축

붙임 1) 생태경관 보행구역 계획(안) 1부.

2) 생태경관 보행구역 QR코드 설치 및 활용방안 1부.

3) 생태경관 보행구역 3차원 탐방체험 서비스제공 1부.  끝.