투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설사업관리단장
(경유)
제목	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설사업관리기술자(기계,소방) 투입기간 변경 승인

1. 하남 제21 - 104호(2021.02.18.)와 관련입니다.

2. 위호와 관련「하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리용역」설비분야(기계,소방)의 건설사업관리기술자 투입기간 변경 승인 요청에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 사업관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

구분	투입기간		증․감	비고
	당 초	변 경
기계	2020.06.16.~2021.05.31. 2022.01.01.~2022.09.30	2020.06.16.~2021.05.31. 2022.02.01.~2022.09.30	감)1개월	중급
소방	2020.06.16.~2021.05.31. 2022.01.01.~2022.09.30	2020.06.16.~2021.05.31. 2022.02.01.~2022.09.30	감)1개월	고급

※ 2번 출입구(외부) 구조물 인수시기 변경시 투입기간 조정될 수 있음.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	전수철		설비계획과장	장병선		도시철도설비부장	전결 02/19 김중영
협조자
시행	도시철도설비부-1755	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/	jsc5298@seoul.go.kr	/	부분공개(5)