문서번호	한옥건축자산과-1726
결재일자	2021. 2. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		한옥관리팀장	한옥건축자산과장
이정은		정광재	02/19 신동권
협조

- 공공한옥〔누하동 259〕조성공사 관련-

준공기한 연장 검토 보고

2021. 2.

공공한옥〔누하동 259〕 조성공사 준공기한 연장 검토 보고

공공한옥(누하동259)조성 공사를 위탁 중인 SH공사로부터 제출된 준공기한 연장 요청에 대하여 검토 보고드림

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 경복궁서측 「도시재생 현장지원센터」조성

○ 위    치 : 종로구 누하동 259

○ 공사내용(규  모) : 증축 및 대수선 (지상2층, 연면적121㎡)

○ 사업기간(사업비) : ’20.4. ~’21.3.(998백만원)

□ 추진경위

○ ’19.12.05 : 공공한옥 부지매입 및 등기완료(매입가 2,800백만원)

○ ’20.02.18 : 공사 추진 의뢰(시→ SH)

○ ’20.10.12  : 공사착공(시공자: 민정토건)

□ 준공기한 변경 내용

○ 준공기한 변경(연장) 내용 및 사유

구 분	당 초	*****	***	**********
건 축	2020.09.22. ~ 2021.02.21.	*********** *************	******	************************* ********************** ***************************
전 기	2020.09.16. ~ 2021.02.11.	*********** *************	******
정보통신	2020.09.16. ~ 2021.02.11.	*********** *************	******

□ 검토결과

○ SH공사로부터 제출된 준공기한 연장 사유로 기간연장은 적정하다고 판단됨.

붙임 : 준공기한 연장관련 서류(SH공사 제출서류) 1식.  끝.