문서번호	시설보수과-581
결재일자	2021. 2. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
강연홍		류태용	02/22 박문희
협 조

여의2교 보수공사 -

발주계획 검토 보고

2021. 2.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

[시설보수과]

여의2교 보수공사  -

발주계획 검토 보고

2021년도 예산사업으로 추진 예정인 『여의2교 보수공사』에 대한 발주계획 검토 보고 임

Ⅰ		사업개요

□ 공 사 명 : 여의2교 보수공사

□ 위    치 : 여의2교(영등포구 여의도동 18 ~ 영등포동 94)

□ 사업개요 : 교면방수 및 포장 42.7@, 표면보수 924㎡, 기타 1식

□ 사업기간 : 착공일로부터 180일간

□ 사 업 비 : 900백만원

(예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 여의2교보수공사, 시설비및부대비, 시설비)

Ⅱ		발주전 추진사항

□ 추진사항

○ 2020. 4. 6.~10. 30 : 정밀안전점검용역

- 상태평가 : B등급

- 공용성 확보등 내구성 향상을 위한 유지관리 필요

○ 2021년도 예산 확정 금액 : 900백만원

○ 2021. 1. 27 : 특정기술 선정심사위원회 개최(교면방수 분야)

○ 2021. 2. 10 : 계약심사 의뢰

○ 2021. 2. 17 : 계약심사 결과 통보                        (단위:천원)

예산액	심사요청액	심사금액	조정액	조정률
900,000	771,000	733,000	감) 38,000	4.9%

Ⅲ		세부 발주계획

□  총 공사비 : 862,000천원

○ 도급비 : 733,000천원, 관급비 97,000천원, 이전비 32,000천원

□  발주방법

○ 제한경쟁입찰 : 추정가격 10억미만 전문공사

※ 행정안전부 예규 제89호(2019.10.8.)

- 지방자치단체입찰 및 계약집행기준 제4장(제한입찰 운영요령)

□  입찰참가자격

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제13조 및 동법 시행규칙

제14조 규정에의한 자격요건을 갖추고, 입찰공고일전일부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일)까지 주된영업소가 서울특별시에 소재한 업체

○ 「건설산업기본법」에 의한 전문건설업 중 시설물유지관리업을 등록한 업체,

또는 전문건설업 중 포장공사업, 습식·방수공사업, 철근·콘크리트공사업, 비계·구조물해체공사업을 모두 등록한 업체,

또는 종합건설업 중 토목공사업(또는 토목건축공사업)을 등록한 업체로서 입찰일(낙찰자는 계약 체결일)까지 계속 유지하여야 함.

※ 본 공사는 종합건설업과 전문건설업간 업역규제폐지 대상공사 임.

Ⅳ		향후계획

□ 2021. 2. : 공사발주

□ 2021. 3. : 계약 및 착공

□ 2021. 3. ∼ 9월  : 공사시행

따로붙임 : 1) 공사설명서 1부.

2) 계약심사결과(내역서) 1부.

3) 특허관련 협약서 1부.  끝.