투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경(총차11회·7차1회) 및 준공기한 연기 의뢰(신상도 지하차도 확장공사)

우리부에서 시행 중인「신상도 지하차도 확장공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차11회· 7차1회) 및 준공기한 연기 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 신상도 지하차도 확장공사

2. 계약금액 : 13,458,300,000원(7차 2,462,000,000원)

3. 공사기간 : 2007.12.31. ~ 2021.6.30.(7차 2020.10.1. ~ 2021.2.28.)

4. 계 약 자 : (유)한백종합건설 외 1개사(대표 이진일)

5. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	비 고
계약금액	총차	13,458,300,000원	18,773,590,000원	증 5,315,290,000원
	7차	2,462,000,000원	2,462,000,000원	변경 없음

- 변경사유 : (총차) 기 실정보고 승인사항 및 설계변경 계약심사 결과 반영

(7차) 총차 물량 내 차수 물량 조정

6. 준공기한 연기

구 분		당 초	변 경	비 고
공사 기간	총차	2007.12.31.~2021.6.30.	2007.12.31.~2021.12.31.	증 6개월
	7차	2020.10.1. ~ 2021.2.28.	2020.10.1. ~ 2021.2.28.	변경 없음

- 연기사유 : 붙임문서 참조

7. 예산과목 : 안전총괄실 도로계획과, 도로 건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 신상도 지하차도 확장, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 및 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	이시연		방재시설과장	김태중		방재시설부장	02/22 박홍봉
협조자
시행	방재시설부-2250	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/	siyeon0907@seoul.go.kr	/	부분공개(5)