문서번호	도로보수과-1616
결재일자	2021. 2. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
이상구		代최완	02/22 고영준
협조

2021년 포장도로 굴착복구공사 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.  2.

2021년 포장도로 굴착복구공사 추진계획

우리사업소 관내 특별시도에서 지하매설물 관리자가 도로굴착후 복구 의뢰시 원할한 공사추진과 시민불편을 최소화 하고자 다음과 같이 추진계획을 수립하여 시행코자 함.

		관련근거

❍ 2021년 도로굴착복구기금 시설비 재배정 통보[도로관리과-2877호(2021.2.18.)]

		사업개요

❍ 공 사 명 : 2021년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)-북부

❍ 위    치 : 관내(종로, 성북, 강북, 도봉, 노원구) 시도상 차도

❍ 공사기간 : 착공일로부터 ~ 2021.12.31.

❍ 규    모 : 굴착복구 49a, 표층확폭복구 53a, 절삭후덧씌우기 850a

❍ 공사방법 : 굴착복구 허가기관(각 구청)이 도로관리청(도로사업소)으로 굴착복구 의뢰건에 대하여 복구(특별시도)

❍ 소요예산 : 5,322백만원

※ 예산과목 : 안전총괄실 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로굴착복구(도로굴착 복구기금), 도로굴착복구공사, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

		시행방법

❍ 도로포장 굴착복구공사에 따른 폐아스콘 처리 및 노면표시 설치공사는 본 공사와 분리 발주

		추진계획

❍ 포장도로 굴착복구 공사(연간단가) 시행

- 공 사 명 : 2021년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)-북부

- 위    치 : 관내(종로, 성북, 강북, 도봉, 노원구) 시도상 차도

- 공사기간 : 2021. 3.~2021.12.

- 규    모 : 굴착복구 49a, 표층확폭복구 53a, 절삭후덧씌우기 850a

- 소요예산 : 5,322백만원(도급비 2,198백만원, 관급비 2,276백만원, 이전비 848백만원)-폐기물 처리, 노면표시 포함

- 입찰방법 : 일반경쟁입찰

❍ 폐기물처리

- 2021년 포장도로 폐아스콘 운반 및 처리 용역(연간단가)-북부에 포함 시행

- 소요예산 : 190백만원

❍ 노면표시 설치

- 2021년 포장도로 굴착복구․시행도로 노면표시 설치공사(연간단가)-북부에 포함 시행

- 소요예산 : 200백만원

		향후계획

❍ 2021. 2.  : 일상감사 의뢰

❍ 2021. 3.  : 공사발주

❍ 2021. 3.   : 공사계약 및 착공

❍ 2021.12.  : 준공

붙임 1. 설계내역서 1부.

2. 관련공문 1부.  끝.