문서번호	정수과-2132
결재일자	2021. 2. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
박재중		유준수	02/22 조성태
협 조
	정수시설과장			전훈
	주무관			김석규

유해화학물질 취급시설 안전진단 추진계획

2021. 2.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

유해화학물질 취급시설『안전진단』추진계획

유해화학물질 취급시설의 법정 안전진단 수행을 위해 전문기관에 컨설팅 용역을 실시 화학사고 예방, 지역주민 및 환경 보호에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

○ 「화학물질관리법」 제24조 및 동법 시행규칙 제24조(안전진단)

- 유해화학물질 화학사고 장외영향평가(‘17.3.3) 후 4년이 지난날부터 60일 이내에 검사기관에서 안전진단 실시(해당연도 정기검사 면제)

○ 안전진단 미이행시 벌칙(법 제59조제7호)

- 3년이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금

□ 현황

○ 추진현황

- 유독물 사용업 등록 : 2014.12.24.

- 유해화학물질 사용업 허가증으로 갱신 : 2016.2.5.

- 유해화학물질 화학사고 장외영향평가 : 2017.3.3

- 사고대비물질 취급시설 위해관리계획 수립 : 2017.3.17

○ 안전진단 대상

화학물질명	액체염소	가성소다	과산화수소
연간취급량	1,400톤	365톤	314톤

○ 법정 안전진단 기관 : 한국가스안전공사, 한국환경공단, 한국산업안전보건공단

□ 추진방향

○ 전문기관의 안전진단 컨설팅 용역을 통해 도서 등 제출자료 사전 준비

○ 한국가스안전공사에 안전진단 실시 후 결과보고서를 한강유역환경청에 보고

□ 추진계획

○ 용 역 명 : 유해화학물질 취급시설 안전진단 컨설팅 용역

○ 용역기간 : 계약일 ~ 12월(안전진단 적합 통보시 까지)

○ 용역대상

- 암사아리수정수센터 유해화학물질 취급시설(배관 등 부대시설 포함)

구 분	시설명	시 설 용 량		용 도
1정수장	가성소다 (NaOH)	저장	200㎥×2기(가성소다50%)	pH조절
		사용	200㎥×4기(가성소다20%) 10㎥×4기(NaOH 20%) 12㎥×1기(희석조)
	염소	저장	78톤 ※취수장 염소배관 연결(사용)	소 독
		중화	12㎥×1기(가성소다20%)
2정수장	가성소다 (NaOH)	저장	45㎥×1기(가성소다50%)	pH조절
		사용	45㎥×2기(가성소다20%) 4.5㎥×1기(가성소다20%) 10㎥×1기(희석조)
	염소	저장	32톤	소 독
		중화	12㎥×1기(가성소다20%)
통 합	과산화수소	7.5톤 × 4기		산화제 / 잔류오존처리

○ 용역내용 (과업지시서 별첨)

- 안전진단 도서작성

▹유해화학물질 취급시설 안전진단 관련 법규에 따라 서면 심사자료 작성

▹안전진단기관의 요구목록에 따른 자료작성 및 보완사항 발생시 자료작성

- 안전진단 현장 컨설팅

▹유해화학물질 취급시설 현장 미비사항 사전점검 및 개·보수 기술지원

▹안전진단 시 진단 참여 및 개선권고사항 대응방안 수립 협조 등

○ 시행자 선정〈※ 추정가격 : 24,200천원〉

- 계약방법 : 수의계약(여성기업)

※ 관련근거 : 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 마목

⇒ 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로 여성기업지원에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 여성기업과 수의계약 가능

- 계약상대자

▹ 상    호 : 라온안전(대표 : 차유미)

▹ 주    소 : 경기도 광명시 새빛공원로 67, A동 1817호

▹ 연 락 처 : ☏ 02-2088-8712, E-mail : laon0107@naver.com

▹ 선정사유 : 우수한 기술력 및 인력을 보유한 여성기업으로 다수의 유해화학물질 취급시설의 현장컨설팅 실적이 있는 업체로 최저가 견적제출

○ 추진일정

용역 계약	□	착수보고회	□	도서 작성 및 현장컨설팅	□	도서 접수 및 심사
암사		사업주		사업주		가스안전공사
’21.2.		’21.3.		’21.3.~4.		’21.4.~5.

□

용역 준공	□	안전진단결과 보고서 제출	□	안전진단 시행	□	안전진단 수수료 납부
암사		한강유역환경청		가스안전공사		가스안전공사 (약2천만원)
’21.12.		’21.11.		’21.5.~10.		’21.5.

□ 행정사항

○ 소요예산 : 24,200천원

- 안전진단 컨설팅 및 ISO22000 업무환경개선 : 14,200천원

▹예산과목 : 정수비, 수선유지교체비(수선유지비), 정수장유지관리

- 유해화학물질 위해관리계획서 도서작성 용역 : 10,000천원

▹예산과목 : 정수비, 수선유지교체비(수선유지비), 정수장시설보수

※ 가스안전공사 안전진단 수수료 : 약2천만원(별도 납부)

붙임  1. 과업지시서  1부.

2. 산출기초조사서 및 여성기업확인서 각 1부. 끝.