청렴으로 신뢰받고, 안전으로 보답하는 서울교통공사
			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)
제목	「철도안전 시행계획」2020년 추진실적 및 2021년 시행계획 변경사항 보고

1. 관련근거

가. 철도안전법 제6조(시행계획) 및 동법 시행규칙 제5조(시행계획 수립절차 등)

나. 안전계획처-7754(’20. 10. 30.)「2021년 서울교통공사 철도안전 시행계획(안) 보고」

다. 안전계획처-8133(’20. 11. 13.)「2020년 철도안전 시행계획 변경계획(안) 보고」

라. 안전계획처-534(’21. 1. 19)「철도안전 시행계획 ’20년 추진실적 및 ’21년 시행계획
변경안 제출 요청」

2. 위와 관련하여, 공사「철도안전 시행계획」2020년 추진실적 및 2021 시행계획 변경사항을 다음과 같이 보고합니다.

가. 2020년 추진실적

○ 세부과제 추진현황

구분	계	추진완료	추진지연*	추진보류*	비고
세부과제(건)	180	171	5	4

⁕ 지연(5건): 민원, 소송, 보상지연 등 사유로 발주 및 계약체결 지연(사고이월)

⁕ 보류(4건): 코로나 19 영향으로 집합교육 및 외부전문가 점검 등 추진보류(’21년 추진예정)

○ 사업예산 집행현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	정부	지자체	자체	기타
집행계획	734,728.5	105,584.6	276,164.2	342,329.7	10,650.0
집행실적	540,461.6	78,572.3	234,894.2	217,122.4	9,872.8
집행률(%)	73.6	74.4	85.1	63.4	92.7

⁕ 집행률(73.6%) 사유: 발주·낙찰차액(사업예산의 약 20%) 및 추진지연·보류 사업 등

나. 2021년 시행계획 변경사항

○ 추진과제 변경

구 분	계	기존 추진과제				신규사업	비고
		소계	정상추진	사업변경	사업취소*
세부과제(건)	138	175	59	71	45	8	△37

⁕ 취소사유: 코로나 19 영향 및 공사 재정여건 악화 등으로 인한 투자사업 중단으로 예산 미배정

○ 사업예산 변경

(단위: 백만 원)

구 분	계	정부	지자체	자체	기타
변경 전	565,476.1	39,435.1	176,512.5	348,221.5	1,307.0
변경 후	470,700.2	41,487.6	184,999.3	242,906.3	1,307.0
증 감	△94,775.9	2,052.5	8,486.8	△105,315.2	-

다. 향후계획(일정)

○ ’21년 시행계획 추진실적 모니터링(매분기): ’21. 3월 ~ ’22. 2월

○ ’22년 시행계획 수립: ’21. 10월

○ ’21년 시행계획 추진실적 제출(국토교통부): ’22. 2월

붙임  1. 서울교통공사 ’21년 철도안전 시행계획(’20년 실적 포함) 1부.
2. 서울교통공사 ’20년 철도안전 시행계획 추진실적(예산표) 1부.
3. 서울교통공사 ’21년 철도안전 시행계획 추진계획(예산표) 1부.  끝.

과장		부장		팀장		본부장(직무대행)	02/22
협조자
시행	안전계획처-1463	(	2021.02.22.	)	접수		(		)
우	04806	서울특별시 성동구 천호대로 346	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9436	/전송	6311-4029	/	vinsent1029@seoulmetro.co.kr	/	부분공개(7)