문서번호	재생정책과-2400
결재일자	2021. 2. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
★주무관	재생사업팀장	재생정책과장
한광희	김영백	02/23 김규룡
협 조

-인공지능 자율주행 복합공간 조성 공사- 기성(제1회) 처리 보고

2021. 2.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 인공지능 자율주행 복합공간 조성 공사 -

기성(제1회) 처리 보고

「인공지능 자율주행 복합공간 조성 공사」와 관련, 도급자 기성(제1회) 청구 사항에 대해 청구사항(공정률 36%, ‘21.2.8.기준) 대비 현 공정현황을 반영하여 *기성 처리하고자 함

* 관련근거 : 지방저치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제67조(대가의 지급) 제3항

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 인공지능 자율주행 복합공간 조성 공사

❍ 위    치 : 용산구 청파로 77 원효전자상가 옥상(1,942.27㎡)

❍ 공사기간 : ‘20.12.21~’21. 6.18(6개월)

*************************************

*************************************

❍ 공사규모 : 인공지능 자율주행(드론, RC카) 테스트베드 공간 조성

(479.72㎡), 쉼터 공간 조성(1,462.55㎡)

2		추진경위

❍ 추진계획 방침(‘20. 9.17)

❍ 설계용역 완료(’20.11.10)

❍ 공사착수 및 추진(‘20.12.21.~) *공정률 36%(’21.2.8.기준)

- 주요 추진사항 : 금속공사(드론,RC카 구조틀 설치 등) 65%, 조적공사             (화단조성 등) 73%, 가설공사(구조틀 가설) 41% 등

3		기성청구액 검토

**************

(단위/원)

*****************************************************************************************************************************************

※ 기성세부내역                                             (단위/원)

***	****	*****	****	********
****	*********	*********	*********	**
****	******	******	*	***
****	*********	*********	*********	**
******	*********		*********	*
****	*********	*******	*******	**
***	**********		**********	*
****	**********	**********	**********	**
****	*********		*********	*
****	*********		*********	*
****	*********		*********	*
****	**********		**********	*
**	***********	**********	***********	*
***	***********	**********	**********	**
***	***********	***********	***********	**

❍ 검토의견

- 도급자 기성청구액은 ‘21. 2. 8.을 기준으로 신청된 것으로 현 시공상태(기성품목별 추가 공사 실시 등) 대비 기성청구액을 비교했을 때 기성청구액은 적정하다고 판단됨

4		향후계획

❍ 기성(제1회) 검수조서 재무과 통보(2월)

* 검사원지정요구서 접수(재무과-8894, ’21. 2.22.)

❍ 적정 공정관리에 따른 공기단축에 따라 조기 준공예정(당초 6.18 → 변경 4~5월)

붙임   1. 기성(제1회)청구내역 1부

2. 보험 및 시국세완납증명서 1부

3. 시공사진 1부.  끝.