문서번호	시설보수과-1795
결재일자	2021. 2. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
이석근		임준빈	02/23 정훈모
협조

2021 청계천 차집관로(좌,우안) 단면보수공사

발 주 계 획 보 고

2021.  2.

중랑물재생센터

시설보수과

2021 청계천 차집관로(좌,우안) 단면보수공사

발  주  계  획  보  고

우리센터에서 추진예정인 『2021 청계천 차집관로(좌,우안) 단면보수공사』에   대하여 아래와 같이 발주계획을 보고드림

1		추진배경

□ 2017~2020년간 시행한 청계천 차집관로 정밀조사 및 정밀안전진단용역 수행  결과 40여년이 경과된 시설로 내부 단면이 노후화가 심하였으며, 내부에 적치된 준설토가 많아  통수능력 및 수질저하의 원인이 되고 있어 정비가 시급한 상태임.

- 현재 청계천 차집관로(좌,안) 정릉천 합류부에서 중랑천까지 년차적으로   시행중임.

· 2017. : 고산자교 하부~마장현대아파트앞(우안, 818m-28억원)

· 2018. : 정릉천 합류부~신답빗물펌프장(좌안, 558m-20억원)

· 2019. : 제2마장교~사근램프(좌안, A열, 423m-11억원)

· 2020. : 정릉천 합류부~사근램프(좌안, 1180m-37억원)

· 2020. : 마장현대아파트~제2마장교(우안, 407m-13억원) → 사고이월

□ 일관성 있는 공사추진을 위해 관련공사 병행추진 시행

- 물막이 및 물돌리기 공사 :

·좌안 : 일반차수공법으로 본 공사내역에 포함 발주(A,B 2열 구조임)

·우안 : 20년 사고이월사업 준공(5월)후 시행해야 하므로 금년 하반기 발주예정

- 차집관거 내부 준설공사 : 2021 준설공사(년간단가)업체 계약 후 시행

- 정밀안전진단용역 : 내부 공사중 결함사항 발생 시 시행예정

2		공사개요

□ 공 사 명 : 2021 청계천 차집관로(좌안) 단면보수공사

- 공사위치 : 청계천 좌안(신답빗물펌프장~사근램프, B열)

- 공사내용 : 단면보수(□ 2.5m×2.9m,  L=1,054m)

- 공사기간 : ‘21. 3. ~ ’21. 12.

- 공 사 비 : 5,000백만원

· 단면보수공사   4,760백만원         · 준설 및 운반처리  200백만원

· 정밀안전진단      40백만원

□ 공 사 명 : 2021 청계천 차집관로(우안) 단면보수공사

- 공사위치 : 청계천 좌안(제2마장교~사근램프)

- 공사내용 : 단면보수(□ 2.4m×2.4m,  L=432m)

- 공사기간 : ’21. 10. ~ ’21. 12.

- 공 사 비 : 3,000백만원

· 단면보수공사    2,100백만원       ·물막이 및 물돌리기   800백만원

· 준설 및 운반처리  70백만 원       · 정밀안전진단         30백만원

〔 공사위치도 〕

3		공사시행방법

물막이공사

≫≫≫

차집관거 준설

≫≫≫

정밀안전진단

(필요시)

≫≫≫

단면보수공사

※ 준설작업, 정밀안전진단, 단면보수(벽체, 슬라브) : 물막이,물돌리기(주간시행)

단면보수(바닥) : 물막이, 물돌리기(주, 야간 시행)

※ 공법선정 : 2021. 2. 8.공법심의회 개최후 선정완료

- 좌안 : KRCD공법, E-CON공법, HI-PA공법

- 우안 : H-CRM공법, FRUS공법

4		공사 발주방법 검토

□ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

※ 제한입찰계약 운영요령(행정안전부예규 제344호, 2010.12.30)

□ 입찰참가자격

- 건설산업기본법에 의한 토목공사업(토목건축공사업), 시설물유지관리업 면허를 보유한 업체로서 입찰참가자격 판단기준일은 입찰참가신청서류 접수마감일로 함.

- 공동이행방식의 공동계약을 허용(5인 이내로 공동수급체 구성, 각 구성원의 계약참여 최소지분율은 5% 이상)하며, 대표사는 지분율이 많은 업체이어야 함.

- 서울지역업체 시공참여 비율은 지역경제활성화를 위해 최소 49%이어야 함.

- 공동수급체 구성원은 입찰공고일 전일부터 입찰일까지, 낙찰자는 계약체결일까지 주된 영업소가 서울시에 소재

- 본 공사는 특허공법(추후 선정예정)이 일부 적용된 공사로서 낙찰자는 특허공법 기술보유자와 서울시가 체결한 특허 사용협약을 준수하여 특허공법 기술보유자와 기술사용협약을 체결하고 협약서를 제출하여야 함.

- 공동수급체를 구성할 경우에는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 계열회사(상호 출자제한 기업집단 소속 계열회사를 말한다)가 아니어야 하고 공동수급체의 중복결성은 금지함.

□ 낙찰자는 기술보유자에게 기술사용료를 지급하고 기술력을 제공받아 직접  시공하여야 함.(물재생시설과-4610호(2019.04.03.)

□ 하자기간 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙 제68조 (3년)

□ 예산과목 : 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,  수선유지교체비, 수선유지비

·2021 청계천 차집관로(좌안) 단면보수공사

·2021 청계천 차집관로(우안) 단면보수공사

4		추진현황 및 향후 계획

□ 2020.01.19.  : 단면보수공법 적용방안 검토보고

□ 2020.02.09.  : 특정제품(공법) 선정 심사위원회 개최(2.10. 공법선정)

□ 2020.02.23.  : 공법별 설계 및 시방서 작성

□ 2020.02.~03. : 발주전 절차이행(일상감사,계약심사)

□ 2020.03.     : 공사발주(좌안)

※ 우안 : 물막이공사, 단면보수공사 하반기 시행예정

□ 2020.12.     : 공사준공.  끝.