투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	동작구청장(도로관리과장)
(경유)
제목	도로굴착 기간연장 신청

우리사업소에서 시행하고 있는 『2020년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가-제2구역)』와

관련하여 아래와 같이 도로굴착 기간연장을 신청합니다.

1. 공 사 명 : 2020년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가-2구역)

2. 신청내역

연번	부과기관 및 허가번호	위 치	공사기간		비고
			변경전	변경후
1	***********************	****	2020.9.28~2020.11.10	2021.2.17~2021.2.26
2	***********************	*****	2020.9.28~2020.11.10	2021.2.17~2021.2.26
3	***********************	*****	2020.9.28~2020.11.10	2021.2.17~2021.2.26
4	***********************	******	2020.9.28~2020.11.10	2021.2.17~2021.2.26
5	***********************	******	2020.9.28~2020.11.10	2021.2.17~2021.2.26
6	***********************	********	2020.9.28~2020.11.10	2021.2.17~2021.2.26

3. 신청사유 : 민원에 따른 공사 기간 연장.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	이태근		기전과장	02/23 代김해중
협조자
시행	기전과-1212	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145 남부도로사업소 (대림동)	/
전화	02-3284-5433	/전송	02)3284-5470	/	hermen@seoul.go.kr	/	부분공개(5)