문서번호	기전과-1265
결재일자	2021. 2. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
박상갑		김해중	02/24 석대창
협조	주무관		이정호
	주무관		조소현

『상도터널 진입차단설비 설치 공사』 준공기한 연기요청 검토보고

2021. 2.

남부도로사업소

(기  전  과)

상도터널 진입차단설비 설치 공사

준공기한 연기요청 검토 보고

동절기 굴착 제한에 따른 공사 기간 부족의 사유로 준공기한 연기 요청이 있어 내용을 검토하고 아래와 같이 조치하고자 함.

1		관 련 근 거

○ 「상도터널 진입차단설비 설치 공사」준공기한 연기요청 접수(2021.02.24.)

2		사 업 개 요

○ 공 사 명 : 상도터널 진입차단설비 설치 공사

○ 공사내용 : 터널진입차단 설비 기초공사, 전기 및 통신 공사

○ 계약금액 : **************************

○ 공사기간 : 2020. 12. 15. ~ 2021. 3. 4.

○ 계약업체 : **************

- 주    소 : ************************

- 연 락 처 : ************

○ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로터널 방재시설 개선, 시설비

3		검 토 내 용

○ 공사기간 연장 사유

- 동절기 굴착 제한에 따른 공사 기간의 부족

○ 당초 공사기간 : 2020. 12. 15. ~ 2021. 3. 4.

○ 변경 공사기간 : 2020. 12. 15. ~ 2021. 5. 14.

○ 계약 증∙감액 : 변경 없음

4		검 토 결 과

○ 보고자 의견 : 업체 요청 사항 수용

- 동절기 굴착 제한(12월 ~ 2월)으로 공사의 진행 불가하여 당초 준공 기한 내에 공사의 완료는 사실상 불가하다고 판단되므로 준공기한 연기는 타당함.

- 굴착 제한 기간이 3개월임을 고려할 때 연장 기간[~5. 14.(71일)]은 타당함.

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

붙임  공사 준공기한 연기요청 공문 1부.  끝.