문서번호	소방행정과-1632
결재일자	2021. 2. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
오승민	김근섭	代강철희	02/24 최성희

안전한 중랑! 행복한 시민!

2021년도 주요 예산사업 추진계획

중 랑 소 방 서

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

1		중화119안전센터 이전 건축 [기부체납]

중랑구 중화동 일원의 재정비촉진계획 고시에 따른 안전센터 이전 건축 (중화동 재개발 조합 건축 완공 후 중랑소방서 이관)

□	사업개요

○ (위    치) 중화동 303-7 ⇒ 중화동 303-5,6

- 신축 청사 입주 후 기존청사 철거

○ (건축규모) 5/1층, 연면적 1446.54㎡ ※ 최초승강기 적용

○ (사업기간) 2021년 3월 ~ 10월 (예정)

- 주민 보상 및 이주 일정에 따라 착공시기 지연가능

□	추진과정

○ (`16.10) 중화3재정비촉진구역 결정에 따른 주민 제안

↳ 대지 493.24㎡, 연면적1,903㎡, 층수 6/1층 (4~6층 주민편의시설 활용)

○ (`16.11) 중화119안전센터 규모 회신(중랑소방서)

↳ 대지 493.24㎡, 연면적 817.65㎡, 층수 3/1층

○ (`18.12) 중화3재정비촉진구역 사업시행 인가(중랑구청)

○ (`20.08) 중화119안전센터 신축규모 재 협의 (주민편의시설 활용 불가)

○ (`20.09) 중화119안전센터 규모 확정

↳ 대지 493.20㎡,  연면적 1446.54㎡,  층수 5/1층

○ (`20.12) 중화119안전센터 설계 협의(솔종합건축사사무소)

□	향후계획

○ (`21.02) 중화119안전센터 설계 협의

○ (`21.04) 중화119안전센터 실시설계 완료

○ (`21.05) 중화119안전센터 건축 공사 착공(예정)

○ (`21.12) 중화119안전센터 건축 공사 준공(예정)

○ (`22.01) 중화119안전센터 이전(예정)

2		직원복지 향상을 위한 청사환경 개선 (보수·보강)

코로나19 감염병 확산 방지를 위하여 비대면 접견(민원)실을 설치하고, 청사 보수·보강 사업을 통해 안전사고방지와 직원 편의 제공

□	본서 비대면 접견(민원)실 설치	본서 주차장 입구

설계(안)

○ 소요예산 : 금50,000,000원(금오천만원)

○ 세부추진계획

2021. 2월	⇨	2021. 3월	⇨	2021. 4월 ~ 5월
견적 의뢰		계약 체결		공사착동 및 준공

□	청사 도색	청사 내․외부 전체(펜코일 및 칸막이)

○ 소요예산 : 금145,000,000원(금일억사천오백만원)

○ 세부추진계획

2021. 2월	⇨	2021. 3월	⇨	2021. 4월 ~ 5월
도색 공사내역서 작성		계약 의뢰(계약심사과) 및 체결		도색 공사 착공 및 준공

□	노후 승강기 교체	본서(지하1층 ~ 지상4층)

용 도	중 량	속 도	대 수	운행층수	비 고
승객용	13인승	60m/m	1	5개층	냉·난방기

○ 소요예산 : 금62,000,000원(금육천이백만원)

○ 세부추진계획

2021. 2월	⇨	2021. 3월	⇨	2021. 4월 ~ 5월
공사 견적 의뢰		계약 체결		공사 착공 및 준공

□	논슬립 패드 설치	본서 및 각 안전센터 내·외부 계단 등

○ 소요예산 : 금12,000,000원(금일천이백만원)

○ 세부추진계획

2021. 2월	⇨	2021. 2월 ~ 3월	⇨	2021. 3월
견적 의뢰		설치 대상 선정		설치