문서번호	도시철도설비부-1912
결재일자	2021. 2. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	신호과장		도시철도설비부장
이원호	구봉서		02/24 김중영
협 조
	송변전과장					代김병훈
	정보통신과장					김이곤
	주무관					정덕환

「하남선(5호선연장) 건설사업 시스템통합 책임감리용역」

준공기한 연장 검토 및

계약변경 계획 보고

2021.02.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「하남선(5호선연장) 건설사업 시스템통합 책임감리용역」

준공기한 연장 검토 및 계약변경 계획 보고

***************************************************************************************

1		용역개요

○ 용 역 명 : 하남선(5호선연장) 건설사업 시스템통합 책임감리용역

○ 규    모 : 연장 7.7㎞, 정거장 5개소(H1 ~ H5), 차량기지, 종합관제실

○ 용역기간 : 2018.06.07. ~ 2021.06.06.

○ 계약금액 : ***********

○ 계약현황(하남선 건설사업 시스템통합 책임감리용역)

(단위: 천원)

계 약 자	총차		1차(준공)			2차(준공)		3차(진행 중)			4차(예정)
	용역 기간	금 액		용역 기간	금 액	용역 기간	금 액		용역 기간	금 액	잔액
********* ****	********* ***********	*********		********* ***********	*********	********* ***********	*********		********* ***********	*********	*********

○ 감리원 투입현황

(단위: 인/월)

구분	분야	감리원 투입 인수(고급기준)
		총차	1차	2차	3차 (진행 중)
시스템통합 (상주)	**	*****	*****	*****	*****
	**	****	****	****	*****
	**	****	****	*****	*****
시스템공사 (상주)	**	*****	*****	*****	*****
	**	***	*****	*****	*****
	**	*****	*****	*****	*****
비상주	**	***	****	****	****
	**	*	****	****	****
	**	***	****	****	****
합계		*****	******	******	******

2		준공기한 연장(총차) 검토

○ 준공기한 연장 경위 및 사유

- 20.12.07. : ******************

- 21.01.04. : ***************************

▶ *****************************************

▶ *****************************

- 21.02.17. : ******************************************************************************

- ***************************************************************************

○ 준공기한 연장 세부내역

용역명	계약기간			비고
	변경 전	변경 후	증감일
하남선(5호선연장) 건설사업 시스템통합 책임감리용역(총차)	*********** * ***********	*********** * ***********	******
하남선(5호선연장) 건설사업 시스템통합 책임감리용역(4차)	*********** * ***********	*********** * ***********	******	계약 예정

3		변경계약 내역(예정)

○ 총차 및 4차 계약 예정 내역

가. 계약번호: **************

나. 계약자: ************************

다. 계약일자: ***********

라. 변경내용: ********************

구분	계약기간
	당 초	변 경
총차	*********************	*********************

마. 변경사유: *******************************

바. 지체상금: 미부과

사. 4차 계약의뢰

- 계약자: ************************

- 계약기간: *************************

- 계약금액: ***************

- 예산과목: 광역교통시설특별회계, 광역철도 건설사업, 하남선(5호선연장) 광역철도 건설, 감리비

○ 변경계약에 따른 감리원 투입 계획(4차)

구분	분야	등급	성명	2021										2022							투입인수 (인/월)
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
시스템통합 (상주)	**** ***	**	***																		*****
	** **	**	***																		*****
	**	**	***																		*****
	**	**	***																		****
		**	***																		*****
시스템공사 (상주)	**** ***	**	***																		*****
		**	***																		*****
	**	**	***																		****
		**	***																		****
		**	***																		*****
	**	**	***																		*****
비상주	**** ***	**	***																		****
	**	**	***																		****
	**	**	***																		****

※ **********************

4		향후계획

○ 2021.02.24.: 변경계약 및 4차 계약 의뢰(도시철도설비부 → 재무과)

○ 2021.02.28.: 3차 용역 준공

○ 2021.03.01.: 4차 용역 착수

붙임: 1. 입출고선 종합시험운행 관련 회의록 1부.

2. 감리원 배치계획(총차) 1부.

3. 계약내역서(4차) 1부.

4. 합의각서(총차 및 4차) 1부.