투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(제2자유로 종점부 입체화 공사 소규모 지하안전영향평가 용역)

우리부 건설공사인 「제2자유로 종점부 입체화 공사」 의 소규모 지하안전영향평가 용역 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 제2자유로 종점부 입체화 공사 소규모 지하안전영향평가 용역

나. 도 급 비 : 46,193,280원

다. 용역기간 : '20. 6.12 ~ '21. 2.28

라. 도 급 사 : ㈜에이치에스엔지니어링

마. 예산과목 : 도로건설, 간선도로망 확충(교통사업특별회계), 제2자유로 종점부(난지도길)입체화(교통개선분담금 계정), 시설비 및 부대비, 시설비

바. 준공기한 연기 (※계약금액 변경 없음)

- 당초 ′20. 6.12 ~ ′21. 2.28 →  변경 ′20. 6.12 ~ ′21. 4.13(50일 연장)

사. 연기사유 : 붙임 참조

붙임 : 1. 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
★주무관	조동협		토목총괄과장	진재섭		토목부장	02/24 김용제
협조자
시행	토목부-3631	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2543	/전송	02-3708-2599	/	yerom@seoul.go.kr	/	부분공개(5)