문서번호	녹지관리과-1212
결재일자	2021. 2. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹지관리과장
신경환		02/25 곽영만
협 조

서울제물포터널 민간투자사업 건설공사

협의 검토 보고

공  원  부

(녹지관리과)

서울제물포 민간투자사업 건설공사 협의 검토보고

여의도지구 샛강공원 내 ‘서울제물포터널 민간투자사업 건설공사(2공구)’와 관련하여 도시기반시설본부에서 제출한 조경 복구공사 시행계획이 변경에 따른 내부 검토를 마치고 아래와 같이 보고드림

▢ 공사 현황

○ 건    명: 서울제물포터널 민간투자사업 건설공사(2공구)

○ 복구위치: 여의샛강 공원 녹지 사면

○ 공사기간: 2015. 12. 16. ~ 2021. 4. 15.

○ 협 의 처: 서울특별시 도시기반시설본부(방재시설부)

▢ 협의 내용

○ 서울특별시 도시기반 시설본부(방재시설부)

- 서울제물포터널 민간투자사업과 관련하여 샛강 조경복구 공사 시행계획 변경에 따른 한강사업 본부 의견 회신 및 협조 요청 (붙임참조)

▢ 검토 의견

○ 사업계획의 변경은 현장여건 및 수목의 수급여건에 따른 사항으로 변경계획 수용

○ 호안블럭으로 사면 정비시 수목 및 숙근초 식재가 가능한 식혈 호안블럭으로 변경 검토 요청

▢ 향후 계획

○ 상기 검토의견을 도시기반시설본부로 회신하고자 함.

붙임   조경 복구공사 변경계획 1부(도시기반시설본부).  끝.