문서번호	설비부-2520
결재일자	2021. 2. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	녹색성장과장	설비부장
김수진	오삼록	02/25 김중영

『동부간선도로(2공구) 전력자동제어시스템』

설계변경(정산) 검토 보고

2021. 2.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로(2공구) 전력자동제어시스템』

설계변경(정산) 검토 보고

『동부간선도로(2공구) 확장 전기공사』와 관련하여 건설사업관리기술단으로부터 제출된 관급자재(전력자동제어시스템)의 설계변경(정산)에 대하여 검토하고 보고 드림

1		물품현황

❍ 계약건명: 동부간선도로 확장(2공구) 전력자동제어시스템 구매

❍ 계약기간: 2019.12.06. ~ 2021.02.28.

❍ 계약금액: 457백만원

❍ 계약상대자: ㈜싸이몬

❍ 건설사업관리단: ㈜이산

2		검토내용

관련근거

❍ 전력자동제어 계약 조정건 검토 보고[동부2감-21-64호(2021.2.19.)

관급자재 변경내용

❍ 설계변경 사유

- 서울시설공단 요청에 따른 도봉지하차도 관리사무소 확장안 변경 설계 적용

- 동부간선도로 관리사무소에 1, 3공구 통합감시제어시스템 구축

- 전기공사 및 수배전반과 중복 산출된 물량 감소

- 준공에 따른 제경비 정산(건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양료 등)

❍ 변경(정산)금액                                             [단위: 천원]

구 분	당 초	변 경	증, 감(-)	비고
전력자동제어	457,000	457,000	-

❍ 주요 변경내용

품 명	단 위	증 감(-)	변경금액 (단위: 천원)	변경사유
책상	EA	********	*****	- ************************************
의자	EA	********	*****
서랍장 및 가구	EA	********	*****
대형모니터	EA	********	******
멀티브라켓	EA	********	*****
DID시스템 케이블	EA	********	*****
DID시스템 인테리어	m	********	*****
백본스위치(L3)	EA	********	*****	- *******************
백본스위치(L2)	EA	********	******
광점퍼코드	EA	********	*****
광모듈	EA	********	*****
프로그램 개발	식	********	******
배관 및 부속자재	m	*******	********	************
최대수요전력제어기	m	********	*******
제어케이블	EA	*******	*****	*******************
간접공사비	식	********	********	*********************

건설사업관리기술자 검토의견

❍ 전력자동제어 시스템 구매에 대한 서울시설공단 요청사항 및 1,2,3공구 통합 연동에 설비 설치공사와 중복 설계반영된 공사자재의 수량 조정, 보험료 등 정산에 따른 변경설계서를 검토한 결과 계약금액 조정은 적정하다고 판단됨.

3		보고자 의견

❍ 현장 여건 및 각종 보험료 등을 정산 반영하기 위한 건설관리사업 기술자의 검토보고 내용이 타당하다고 판단되므로, 설계변경(정산)하고자 함

붙 임: 건설사업관리단 공문 1부.  끝.