문서번호	정수시설과-1870
결재일자	2021. 2. 25.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
정덕교		이천영	02/25 代방진표
협 조
	행정관리팀장			박은경

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

계약해지 검토 보고

「유해화학물질 취급시설 정기검사 대비 배관검사 및 내진검사 용역」

2021. 2.

광암아리수정수센터

[정수시설과]

계약해지 검토 보고

「유해화학물질 취급시설 정기검사 대비 배관검사 및 내진검사 용역」

「유해화학물질 취급시설 정기검사 대비 배관검사 및 내진검사 용역」과 관련하여 발주부서의 불가피한 사정으로 계약해지 검토를 보고드림.

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 유해화학물질 취급시설 정기검사 대비 배관검사 및 내진검사 용역

○ 용역규모

- **************************

- *******************************

○ 계약금액 : ************

○ 계약상대자 : ****************

Ⅱ		검토내용

○ 2021. 2. 23. 계약상대자와 계약 체결하여 용역을 진행 하던 중 발주부서에서 지침서에 내진검사 현장대리인의 정확한 자격 요건을 명시하지 않아 현장대리인 지정이 불가능한 상황임.

○ 또한 해당 자격 요건(토목구조관련)을 충족하는 근로자가 없음.

○ 이에 따라 내진검사 용역 진행이 불가능하다 판단하여 계약해지를 진행하고자 함

○ 관련근거 :『지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 』제14장제7절제4항가호

- 발주기관은 “3-가”의 각 호의 경우 외의 객관적으로 명백한 발주기관의 불가피한 사정이 발생한 때에는 계약을 해제·해지할 수 있다.

Ⅲ		향후계획

○ 계약상대자인 ‘㈜한국환경안전기술’로부터 용역해지합의서를 제출받아 계약을 해지 후 해당 요건을 갖춘 업체와 내진검사 용역 계약 추진 예정

붙 임  1. 용역해지합의서 1부.

2. 계획서 및 계약서 각 1부.  끝.