문서번호	종보전연구실-1406
결재일자	2021. 2. 26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	종보전연구실장	동물원장		서울대공원장
김민수	여용구	어경연		02/26 이수연
협 조
	총무과장		박신근
	동물복지1과장		윤정상
	동물기획과장		김보숙

- 종보전지구 환경개선 공사에 따른 -

동물이동 및 임시사육환경 조성계획

서울대공원

(종보전연구실)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 종보전지구 환경개선 공사에 따른 -

동물이동 및 임시사육환경 조성계획

종보전지구 환경개선 공사에 따른 동물 이동 및 임시 사육환경 조성 계획을 아래와 같이 수립, 추진하여 환경개선 공사기간동안 원활한 동물이동 및 사육, 연구업무에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ			추 진 배 경

○ 야생생물보호에 관한 법률 제16조의2(국제적 멸종위기종의 사육시설 등록 등)

○ 서울대공원 종보전지구 환경개선공사 실시설계용역 시행계획(시설과-5026, 2020.06.30.)

Ⅱ			종보전지구 동물현황

□ 종보전지구(토종동물번식장 + 종보전교육관)

○ 토종동물번식장 : 6종 46수

○ 종보전교육관 : 7종 177수

□ 환경개선 공사에 따른 이동 대상 동물

동물명	두수	현 사육장	이동 예정지	비고
여우	20(10/10)	토종동물번식장	검역격리사
삵	12(6/6)	토종동물번식장	검역격리사
스라소니	2(1/1)	토종동물번식장	검역격리사
코요테	5(1/4)	토종동물번식장	여우사
남생이	110(4/10/96)	토종동물번식장	종보전교육관
슬로우로리스	2(2/0)	종보전교육관	남미관	영구이동
합 계	6종 151수

Ⅲ			추 진 방 향

○ 동물간 투쟁 및 안전사고 예방을 위한 임시시설 보완

○ 사육사 근무 환경 개선을 위한 사무실 정비

○ 사육 환경변화에 따른 이상행동 및 발생가능 질환 미연 차단

○ 동물 이동시 발생할 수 있는 안전사고 방지

○ 동물복지를 위한 시설 강화

Ⅳ			추 진 계 획

□ 종별 이동 계획

동물명	현 동물사	이동 예정지	선행작업
여우, 삵, 스라소니	토종동물번식장	검역격리사	검역격리사 보수 선행
코요테	토종동물번식장	舊 여우늑대사 (현 미사용시설)	여우늑대사 출입문 및 안내판 보수
슬로우로리스	종보전교육관	남미관	남미관 사육시설 조성 선행
남생이	토종동물번식장	종보전교육관	종보전교육관 실내 사육시설 이전설치
산양	토종동물번식장	국립공원관리공단 종복원기술원 북부지원센터(안)	수컷 외부 반출 선행 ※ 별도 추진계획 상신 예정

Ⅳ			세부 추진계획

□ 임시 사육환경 조성 계획

1. 여우 투쟁방지를 위한 렉산 설치 - 옆칸으로 발이 들어가 옆개체로부터 교상방지를 위한 렉산 측면 설치 - 사육장 11칸 98m 길이 설치 - 렉산롤 구입하여 길이별 직접 절단 후 부착
2. 여우, 삵, 스라소니 천장 비가림막, 일부 낙하방지망 설치 - 동물복지를 위하여 일부분 천장 비가림막 자체 설치(길이 60m) - 삵 개체가 높은 곳에서 낙상할 위험을 방지하고자 낙하 방지망 설치
3. 코요테 방사장 문, 안내판 보수 - 현재 미사용 시설인 코요테 방사장 활용(출입문 및 안내판 보수) - 동물칸 사이 출입문 격자 보수 - 코요테 안내판 4개 旣 디자인 안내판을 신규 제작 설치

4. 슬로우로리스 방사장 공사 - 종보전교육관 내 슬로우로리스 2수를 남미관으로 이동(우측 사진 장소) - 남미관 내 슬로우로리스 사육시설(내실) 공사 실시 - 현 법령, 동물복지, 전시 고려한 사육시설 시공 - 향후 예산 확보하여 사육시설(외부방사장) 추가 공사
5. 남생이 온실 시설 이전 - 남생이 여과시설(매립형) 탈착 후 종보전교육관으로 이전 설치 - PVC관 등 재료 구매 후 자체 제작
6. 보금자리 상자 자체 제작 - 목재 등 재료 구매 후 자체 제작 - 기존 상자 활용 및 보수가 필요한 상자만 신규 제작 - 해당동물 : 여우, 삵, 코요테

□ 추가 사항

- 검역격리사 사육사 사무실 내 업무용 PC 설치

- 검억격리사 내 사무실용 캐비넷, 사무용품 등 추가 구매

□ 이동 및 환경 조성 일정(안)

○ 추진계획

- ‘21. 3. : 이동계획 수립, 슬로우로리스 환경개선 공사 시행

- ‘21. 4. : 검역격리사 렉산 보수 작업

- ‘21. 5. : 검역격리사 지붕 비가림막, 삵 추락방지망 설치

- ‘21. 6. : 개체별 보금자리 상자 신규 추가 제작, 코요테 방사장 안내판 제작, 부착

- ‘21. 7. : 동물 이동 준비 완료

Ⅴ			소 요 예 산

□ 임시 사육환경 조성

○ 여우 투쟁방지를 위한 렉산 및 비가림막 설치 : 금6,000천원

- 재료 구매 후 자체 설치(렉산 3T 150M, 렉산 2T 60M, 추락방지망 등)

- 예산과목 : 동물사관리기능 및 야생동물종보전, 야생동물 종보전 연구, 재료비

○ 보금자리 상자 자체 제작 설치 : 금3,000천원

- 조성방식 : 목재 등 재료 구매 후 자체 제작

- 예산과목 : 동물사관리기능 및 야생동물종보전, 야생동물 종보전 연구, 재료비

○ 슬로우로리스 방사장 공사 및 코요테 방사장 문 보수 : 금20,000천원

- 공사방식 : 1인견적 수의계약

- 공사내용 : 코요테 방사장 문보수 및 슬로우로리스 사육환경 공사

- 예산과목 : 동물사관리기능 및 야생동물종보전, 야생동물 종보전 연구, 시설비

※ 양비둘기 등 시설보수는 재료구입 후 자체 시공 실시 및 해당 시설비 예산을 사육환경 공사로 사용

○ 코요테 방사장 안내판 보수 : 금3,000천원

- 예산과목 : 동물사관리기능 및 야생동물종보전, 야생동물 종보전 연구, 사무관리비

○ 남생이 온실 시설 이전 : 금6,000천원

- PVC관 등 재료 구입 후 자체 이전 설치

- 예산과목 : 동물사관리기능 및 야생동물종보전, 야생동물 종보전 연구, 재료비

Ⅵ			협 조 사 항

○ 총무과 : 검역격리사 사육사 사무실 내 업무용 PC 설치

○ 동물기획과 : 현행 법률에 따른 동물 사육면적 확인

○ 동물복지1과 : 슬로우로리스 사육시설 공사 후 관리이전.  끝.