문서번호	환경보전과-949
결재일자	2021. 3. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	생태보전팀장	환경보전과장
김종찬	양마란	03/02 강병기
협 조

2021년 봄철 매립지사면 수목 식재 계획

2021. 3.

서부공원녹지사업소

( 환 경 보 전 과 )

2021년 봄철 매립지사면 수목 식재 계획

매립지사면 생태숲 조성의 일환으로 매립지사면 무입목지에 수목을 식재하고 관리하여 경관 개선 및 생물종다양성을 증대하고자 함

식재 대상지

위  치 : 하늘공원 남동사면

면  적 : 2,000㎡

현  황 : 칡, 환삼덩굴 등이 우점하는 무입목지

하늘을 담는 그릇

하늘공원

하늘계단

대상지

덩굴식물로 덮인 대상지 전경

식재기간 : 4월 5일~4월 23일 (예정)

식재수량 : 갈참나무, 왕벚나무 등 5종 350주

수 종	규 격(m)	수 량(주)	비 고
갈참나무	H2 × R4	70	교목
왕벚나무	H2 × B3	70	교목
팽나무	H2 × R4	70	교목
참느릅나무	H2.5 × R6	70	교목
귀룽나무	H3 × R6	70	교목
소 계		350

추진일정

3.2~31.  : 수목 및 식재관련 자재 구매

4.5~9.    : 대상지 식재기반 정리 작업

4.12~16. : 식재작업 및 지주목 설치

4.19~23. : 스프링클러 설치 및 급수작업

소요예산 : 19,500천원

수목 구입 : 18,000천원

관련 자재 :   1,500천원

예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경․생태테마

공원육성, 서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 재료비 및

사무관리비.  끝.