문서번호	토목부-3930
결재일자	2021. 3. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상근		최진우	03/03 김용제
협조

소화전 이설비 정산 검토 보고

[세종대로 도로공간 재편사업(2구역)]

2021. 3.

도시기반시설본부

(토 목 부)

소화전 이설비 정산 검토 보고

[세종대로 도로공간 재편사업(2구역)]

세종대로 보도 확폭시 소화전 이설에 대한 이설비 정산을 하고자 검토 보고 드림.

**********************************************

Ⅰ		관 련 근 거

○ 서우 제2021-5(2021. 1. 25.)호 : 소와전 이설건에 대한 의견

○ 세종수 제2021-69호(´21. 2. 9.) : 소화전 이설비 변경건에 대한 검토 보고

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 세종대로 도로공간 재편사업(2구역)

○ 위    치 : 서울역 교차로~시청 교차로

○ 규    모 : 차로축소, 보행공간 및 자전거도로 조성

○ 공사기간 : 2020. 07. 16. ~ 2021.  3. 31.

○ 도 급 비 : 6,154백만원

○ 시 공 사 : 키움건설(주)외 2개사

○ 감 리 사 : 수성엔지니어링외 1개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

○ 당초 기존 보도 가장자리에 설치되어 있는 소화전(14개소)을 확폭되는 보도 가장자리로 이설하도록 계획되어져 있으나 내역서에 수량만 표기되어져 있고, 설계도서에 위치 및 규격, 연장, 재질 등이 누락되어져 있어 현장 여건을 반영하여 설계변경이 필요함.

○ 설계사의 의견은 지장물 이설비는 설계비를 산출하기 위해 작성한 것으로 이설 수량 및 금액은 현장 여건을 반영하여 변경하는 것이 타당하다는 의견임.

※공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경

- 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

○ 소화전 위치도

당 초
변 경

○ 공사비 현황

【금액단위 : 원】

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
*******	**********	**********	***********
***	*********	**********	***********
****	**********	**********	***********
*****	*********	*********	**********
***	**********	**********	**********

***************************************

Ⅳ		조 치 의 견

○ 소화전 이설은 개소별로 이설 연장 및 이에 소요되는 소요자재가 일정하지 않은바, 설계도서에 세부적인 사항이 누락되어져 있어 설계변경은 적정하다고 사료되며, 추후 설계변경시 내역에 반영하고자 함.

붙임  1. 설계사 의견 공문 1부.

2. 건설사업관리단 검토 공문 1부.  끝.