코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	소방행정과장
(경유)
제목	화생방분석차 제조구매 관련 계약 변경 의뢰

1. 관련문서

가. 안전지원과-3646(2020.2.25.)「화생방분석차 납품기한 연장요청 관련 검토 보고」

나. 제이인터네셔날********1001(2021.2.21.)「“화생방 분석차 납품기한 연장요청”의건」

다. 재무과-61337(2020.12.4.)「코로나19 감염증 관련 계약집행 운영요령 추가사항 통보」

↳ 계약기간연장 가능 : 인적·물적 이동 제한 등 코로나19로 인한 직·간접적인 영향 등

라. 안전지원과-22349(2020.11.20.)「화생방분석차 제작 진행사항 알림」

마. 재무과-12794(2020.3.9.)「계약체결 통보[조연차 및 화생방분석차 제조 구매]」

2. 2020년 계약체결 되어 2021년 3월 중 납품 예정인 화생방분석차에 대해 코로나19로 인한

해상선적 문제로 인해 납품기한 연장 요청이 있어 계약기간을 연장하고자 다음과 같이

계약 변경의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 화생방분석차 제조·구매(규격가격분리 동시입찰)

나. 계약업체 : 제이인터네셔날(대표자:김도영)

다. 계약기간 : 2020. 3. 9.(월) ~ 2021. 3. 9.(화)

라. 변경내용 : 2021. 4. 30.(금)까지 납품기한 연장

마. 변경사유 : 코로나19로 인한 해상선적 일정취소 및 운항스케쥴 변경

붙임 1. 납품기한 연장요청 관련 검토 보고 1부.

2. 합의각서, 납품기한 연기 의뢰서 1부.

3. 화생방분석차 납품연장 요청 문서 1부.(압축파일)  끝.

	안전지원과장
담당자	오창훈		장비관리팀장	정선웅		안전지원과장	03/03 이홍섭
협조자	담당	이광섭
시행	안전지원과-3952	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	http://fire.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3706-1619	/		/	부분공개(5)