문서번호	기후변화대응과-3186
결재일자	2021. 3. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	그린카인프라팀장	기후변화대응과장		환경에너지기획관
이승열	이재복	조완석		03/04 엄의식
협 조

市 소유 전기차 충전인프라 구축 및 운영 계획

2021.3.

기 후 환 경 본 부

(기후변화대응과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

市 소유 전기차 충전인프라 구축 및 운영 계획

市 소유 전기차 충전인프라 구축 및 운영을 효율적으로 시행하기 위해 市 산하 기관인 에너지공사를 대행기관으로 선정하여 전기차 충전인프라 구축 및 운영관리에 만전을 기하고자 함.

1		일반 현황

□ 추진근거

○「서울특별시 서울에너지공사 설립 및 운영에 관한 조례」제21조  (사업의 대행) 및 제28조(대행사업의 비용부담)

○ 전기차 충전인프라 개선 및 구축 운영 대행사업 승인

- 녹색에너지과-1299(2021.01.18.)호

○ 전기차 충전인프라 구축 및 운영 대행사업 제3자 승인

- 기후변화대응과-1162(2021.01.25.)호

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 서울특별시 전기차 충전인프라 구축 및 운영 사업

○ 사업대상 : 市 소유 전기차 충전기 22개소 52기 및 신규 설치 충전기

○ 운영주체 : 서울시 에너지공사

○ ***********************************

○ 과업내용

- 市 소유 충전기 유지보수

- 통합플랫폼 및 유료화 시스템 구축

- 노후시설 교체 및 개선

- 신규 인프라 구축 사업

○ 서울시 소유 전기차 충전기 현황

개 소	총 계	급 속	완 속
22개소	52기	35기	17기

2		세부 사업계획

1. 市 소유 충전기 유지보수

□ 24시간 민원대응시스템 구축

○ 세부 사업 내용

- 통합플랫폼 시스템 활용 실시간 가동상태 확인 가능

- 충전시설 이용 불편 신고시 접수 가능한 24시간 콜센터 운영

- 커넥터 해제 불가, 사고 등 긴급상황 발생 민원접수시 즉각 현장 방문

- 정기 및 수시, 긴급 점검 기록 유지

○ 추진 일정

- 유지보수 용역 발주 및 계약체결 : ’21.2월

- 유지보수 용역 시행 : ~ ’21.12월

○ ************

□ 안전시설 및 부대시설 보완

○ 세부 사업 내용

- 노후 충전기 대상 누전 차단기 교체 및 SPD(서지보호장치) 설치

- 전기차 충전기 전용 절연장갑 비치(COVID19 이후 비치 검토)

- 소모품(커넥터, LCD, 파워모듈 등) 교체

- 충전소별 안전관리 항목 점검 매뉴얼 작성 및 점검표 비치

- 충전소별 안전관리자 선임 : 총 7개소(현 5개소 선임, 추후 2개소 선임 예정)

▸ 선임대상 전기차충전기 기준 : 수전용량 75kW이상 충전기

▸ 대상충전소 : 양재그린카스테이션, 홍제1공영주차장, 서소문청사(지상/지하), 송월동차고지, 마곡중앙광장, 중랑구청 주차장

- 캐노피 설치 : 옥외 충전소 중 캐노피 미설치 충전소(가산공영주차장 등 총 6개소)

○ 공사 일정

- 개선 사업 발주 및 계약 체결 : ’21.2월

- 시소유 충전기 부대시설 개선 시행 : ~ ’21.12월

○ *************

2. 통합 플랫폼 및 유료화시스템 구축

□ 시 전용 통합 플랫폼 구축

○ 세부 사업 내용

- 시 소유 충전기 전용 통합 플랫폼 구축 및 운영

▸ 환경부 저공해차통합누리집(www.ev.or.kr)과 연동(총 4,759기 정보 제공)

▸ 추후 자치구 충전기와 연동작업 추진 예정

- 실시간 통합관제 시스템 운영으로 충전현황 모니터링 가능

▸ 충전기 정상가동 상태, 결제시스템, 전력상태, 충전전력량 사용 변화 등

- 장소 맵 조회 기능 구현으로 충전소별 충전방식 및 충전대수 실시간 확인

- 충전소별 이용율 분석을 통한 효율적인 관리체계 구축

<저공해차통합누리집과 기능 비교>

저공해차통합누리집	서울시 전기차 플랫폼
지역별 충전기 현황, 충전현황, 운영기관, 운전상태, 연락처, 요금, 위치제공	저공해차통합누리집 기능 포함, 충전기 이상 감지 알림 시스템, 결제시스템, 전력상태, 충전횟수 및 충전전력량, 실시간 고장신고, 긴급보수, 콜센터 운영현황 모니터링

○ 시 전기차 충전소 통합플랫폼 구동 화면

시 전기차 충전기 통합플랫폼 구동 화면	주요 기능
	충전현황, 날씨, 전력상태, 충전대수, 장소 맵 조회 기능, 장애상태, 충전전력 사용변화 모니터링 기능 구현 등

○ 공사 일정

- 관리시스템(통함플랫폼) 사업 발주 및 계약 체결 : ’21.3월

- 관리시스템(통합플랫폼) 개발 및 구축 : ~’21.5월

- 시운전 및 준공 : ’21.6월

○ **************

□ 유료화시스템

○ 세부 사업 내용

- 유료화 대상 : 시 소유 전기차 충전기(52기) 설치

- 결제 및 충전상태 정보 수집

▸ 결제정보 : 충전위치, 충전요금, 충전전력량, 결제방식, 사용자 인증 정보 등

▸ 충전상태 정보 : 충전대기, 충전 중, 충전완료

- 유료화시스템 수시 기능검사 실시

▸ 충전프로세스 이상 유무(충전요금 결제 프로세스 포함)

▸ 충전컨트롤러 정상 동작 여부

▸ 비상정지 버튼 동작 검사

○ 공사 일정

- 유료화 시스템 추진 공사 : ’21.4월~5월

- 시운전 및 준공 : ’21.6월

- 유료화 시스템 적용 : ’21.7월

○ *************

3. 노후시설 교체 및 개선

□ 세부 사업 내용

○ 급속충전기

- 시 소유 노후 급속충전기 교체

▸ 노후 급속충전기(설치년도 ’12~’16) 교체 : 8기(충전기 타입 : DC콤보)

▸ 개화산역 공영주차장, 남부초 공영주차장, 망우 제2거주자주차장, 복정역 공영주차장, 서대문구청 주차장, 서울시 본관청사 주차장, 어린이대공원 후문주차장, 창동역 공영주차장

- 부대시설 개선

▸ 충전 안내문 설치, 분전반 교체, 볼라드 및 스토퍼 설치, 주차면 도색 등

○ 완속충전기

- 시 소유 노후 완속충전기 교체

▸ 노후 완속충전기(설치년도 ’11~’13) 교체 : 14기

▸  남산청사(5), 서소문청사(3), 서울시 본관청사(2), 송월동차고지(4)

- 부대시설 개선

▸ 충전 안내문 설치, 분전반 교체, 볼라드 및 스토퍼 설치, 주차면 도색 등

○ 공사 일정

- 노후 충전기 교체 : ~’21.5월

○ **************

4. 신규인프라 구축

□ 시 소유 공용 급속충전기 설치

○ 세부 사업 내용

- 설비규모 : 급속충전기(50kW) 5기 이상 설치(부대시설 포함)

- 설치장소 : 접근성분석 결과 충전수요 높은 지역

○ 공사 일정

- 신규 충전인프라 부지 조사 : ’21.3월

- 발주 및 계약 : ’21.4월

- 신규 충전인프라 구축 완료 : ’21.7월

○ **************

3		행정 사항

□ 사업비 정산

○ 전기차 충전기 개선사업을 위한 선 지급 후 정산 방식

- 대행사업비 선 지급(방침 수립 후 3월 중 지급)

- 사업완료 후 증빙서류를 포함한 사업비 정산 내역 제출 및 승인 후 사업비 내에서 잔액발생시 반납

○ 대행사업비 및 대행수수료

- 대행협약서 제5조에 따라 사업비 교부 시 부가세를 포함 대행 사업비를 교부

- 대행협약서 제6조에 따라 대행수수료 지급 시, 서울시가 정하는 대행수수료에 부가세를 포함 지급

□ 전기차 충전소 수익처리

○ 서울에너지공사로 선입금 처리 후 서울시 세외수입 처리

붙임 : 1. 시 소유 전기차충전기 현황  1부

2. 시 소유 충전기 교체 및 개선 대상  1부

3. 시 소유 전기차충전기 개선 및 구축 대행사업비 내역서  1부.  끝.