문서번호	시설보수과-1822
결재일자	2021. 3. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장
송일섭	03/05 임영철

작업지시 준공기한 연기 검토 보고

2021. 3.

동부도로사업소

(시설보수과)

작업지시 준공기한 연기 검토 보고

「2021년 도로시설물(터널,지하차도,복개) 일상유지보수공사」제1차 작업지시와 관련하여 계속되는 강수에 따른 작업차질에 대해 절대공기 확보를 위해 준공기한을 연기하고자 함.

1		관련근거

○ 시설보수과-1090호(2021.2.8.)「제1차 작업지시」

○ 성보2021-5호(2021.3.4.)「1차작업 공기연장 건」

2		공사현황

○ 공 사 명 : 2021년 도로(터널,지하차도,복개) 일상유지보수공사

○ 공사기간 : 2021.01.11. ~ 12.31.

○ 도 급 비 : 604백만원

○ 공사개요 : 아스팔트포장 120a, 표면보수 100㎡, 단면보수 200㎡

○ 도 급 자 : 은서보강기술주식회사 대표 이승우

3		작업지시 현황

○ 1차 작업지시

- 작업대상 : 석촌지하차도 외 2개 시설물

- 작업내용 : 석촌지하차도 강관배관 22.8m, 위례터널 및 위례중앙지하차도 배수로 준설 46.2㎡, 신축이음부 보수 7m 등

- 작업기간 : 2021.2.06. ~ 3.10.

4		검토내용

○ 위례터널 및 위례지하차도 배수로준설 작업 등 지시하였으나, 동절기 평균기온 영하(5일) 및 강수(4일), 명절(4일) 등 현장여건이 어려워 작업연기가 불가피한 사항임.

※ 작업불가 일수 : 13일

○ 작업지시기한 변경

- 당초 : 2021.2.06.~3.10

- 변경 : 2021.2.06.~3.26

○ 귀책소재 : 발주처

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

5		조치계획

○ 시공사(은서보강기술주식회사)에 제1차 작업지시에 대해 2021.3.26일까지 준공기한 연기통보 조치.

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 기상청 날씨현황 1부.  끝.