코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	전시안내센터 설계진행 알림 및 공기검토 요청(한양도성 유적전시관)

1. 한양도성도감-9666(2020.9.23.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리시에서는 전시안내센터(인포센터)의 공간 효율성과 유지관리에 유리한 설계를 하기 위해 2020.2월까지 재설계를 완료할 예정이었으나 도시공원위원회 심의 등 관련절차 이행에 설계가 지연되고 있음을 알려드리며,

향후, ****************************************************************************************************************************************

3. 따라서, 전시안내센터(인포센터)를 시공해야 하는 ********************************************************************************************************

㈜금성종합건축사사무소(감리자)에서는 위와 같이 공사착공이 지연됨을 알려드리니 감리배치 업무에 참고하시기 바랍니다.   끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	(주)금성종합건축사사무소 대표 이석범님(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 감리자),원택건설(주)대표 오원진님(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 시공자)
주무관	왕승찬		도성관리팀장	이원재		한양도성도감과장	03/05 안중호
협조자
시행	한양도성도감-2203	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)