문서번호	시설과-868
결재일자	2021. 3. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원조성팀장	시설과장
정정훈		이종무	03/08 권종화
협조

- 2021년 남산공원 산사태 예방공사 -

공사자재 지급방법(관급→사급) 변경 검토보고

2021. 3.

중부공원녹지사업소

(시 설 과)

- 2021년 남산공원 산사태 예방공사 -

공사자재 지급방법(관급→사급) 변경 검토보고

우리 사업소에서 추진하고 있는 『2021년 남산공원 산사태 예방공사』 와 관련 공사자재의 지급방법(관급→사급)에 대해 아래와 같이 검토 결과 보고 드림.

□ 공사개요

공 사 명	2021년 남산공원(북측순환로) 산사태 예방공사	2021년 남산공원(장충단로) 산사태 예방공사
위 치	중구 예장동 산5-6	용산구 한남동 산9-25
공사기간	‘21. 03. 04. ~ 05. 22.	‘21. 03. 04. ~ 05. 22.
공사내용	낙석방지망, 락볼트 설치 등	비탈다듬기, 낙석방지망 설치 등
총공사비	********** *************** ***************	********** *************** ***************
도급업체	*****************	*****************

품 명	규 격	수량	당초	변경	비 고
계		***	관급자재	사급자재
레미콘	25-21-120	***			- 북측순환로 예방공사
		***			- 장충단로 예방공사

□ 공사자재 지급방법 변경내역

□ 공사자재 지급방법 변경사유

2020년 2월부터 레미콘의 계약방식이 연간단가 계약에서 다수공급자 계약으로

변경됨에 따라 판매자가 판매권역을 세분화하여 판매하는 방식으로 조정됨

현재 도심지 3구(종로구, 중구, 용산구)를 판매지역으로 등록한 업체가 없어

관급자재 구매가 불가하여 사급자재로 변경하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

□ 행정사항

상기 변경사항에 대해 도급업체에 통보하여 선 시공후 검수된 물량으로 설계변경하여 정산처리코자 함.  끝.