문서번호	시설관리과-4216
결재일자	2021. 3. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
윤안식	김선호	03/08 고신석

「***************」

급수공사비 변경 보고

2021. 3.

「*****************」

급 수 공 사 비   변 경  보 고

****************번지 급수공사 업무수행 중 급수공사비 변동사항이 발생되어 보고드림.

□ 현 황

○ 주    소 : *****************

○ 신 청 자 : ************************

○ 공사개요 : D=40㎜, L=2m

□ 보고내용

○ 상기 건축물은 단독주택(다중주택)으로 건축허가를 득한 후 급수공사 신청에 의하여 급수공사 승인 하였음

○ 당초 단독주택(다중주택) 14세대로 급수공사를 신청하였으나 건축주의 원에 의하여 독립계량기 1개 설치를 요청한 사항으로 공사비 및 원인자부담금 변경 필요

○ 공사비 조정 : (당 초) 3,730천원 ⇒ (변 경) 1,617천원

- 당 초

⇒ 다중주택 14세대 = 2,050,000원+120,000원×14세대 =3,730,000원

- 변 경

⇒ 다중주택 연면적 315.72㎡=1,120,000원+【(315.72-150)×3,000】= 1,617,160원

○ 원인자부담금 조정 : (당 초) 4,251천원 ⇒ (변 경) 4,091천원

- 당 초(다중주택 14세대)

⇒ D15mm 자계량기 14개×327,000원-폐전계량기(D15mm) 1개

= 4,578,000원 - 327,000원 =4,251,000원

- 변 경 (독립계량기 1개)

⇒ 독립계량기 D40mm 1개=4,418000원-폐전계량기(D15mm) 1개

= 4,418,000원 – 327,000원 = 4,091,000원

□ 급수공사비 변경 내역                         (단위:원)

주 소	당 초			변 경			비 고
	계	공사비	원인자 부담금	계	공사비	원인자 부담금
***********	*********	*********	*********	*********	*********	*********	**********

□ 조치계획

○ 공사비 및 원인자부담금 변경 금액을 요금과에 고지금액 변경 요청하여 수요가에 납부토록 안내하고 납부 확인 후 급수공사 연간단가 업체에게 작업지시하고자 합니다.

붙 임 : 공사비내역서 1부.  끝.