문서번호	한옥건축자산과-2240
결재일자	2021. 3. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	건축자산지원팀장	한옥건축자산과장
박강덕	최장길	03/08 신동권
협 조
	건축자산문화팀장		정미영

2021년 상반기 공공한옥 유지보수공사 시행 계획

2021. 3.

도시재생실

(한옥건축자산과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2021년 상반기 공공한옥 유지보수 공사 시행 계획

2021년 상반기 서울 공공한옥 시설점검 결과에 따라 유지보수 공사를 시행하여 공공한옥 보존에 만전을 기하고 이용객들의 만족도를 제고 하고자 함

□ 추진근거

○ 2021년 상반기 서울 공공한옥 시설점검 계획(한옥건축자산과-647, ‘21.1.20.)

○ 2021년 상반기 서울 공공한옥 시설점검 결과 보고(한옥건축자산과-2044, ‘21.3.3.)

□ 추진목적

○ 市 소유(관리) 서울 공공한옥에 대한 상반기 시설점검 중 지적사항 조치

○ 유지보수 및 불편사항 해소하여 이용 만족도 제고

□ 내     용

○ 공사대상 : 서울 공공한옥 12개소

− 2021년 상반기 서울 공공한옥 시설점검 결과 보수공사가 필요한 공공한옥 중 SH공사 소유(관리) 분 제외

○ 공 사 명 : 「2021년 상반기 서울 공공한옥 점검결과 유지보수 공사」

○ 공사기간 : 착공일로부터 1개월

○ 공사방법 : 한옥 전문업체 의뢰 실시(수의계약)

□ 공공한옥별 보수 내용

연번	위 치	보수(예정)내용
1	계동 104-3 (북촌문화센터 교육관)	옆집 흰개미 방제 강의실 1 흰개미로 인한 장판 손상
2	계동 135-2 (마을서재)	- 마룻널 이격 및 뒤틀림 창호지 오염 및 부식
3	계동 15-6 (한옥문화원)	- 안채 화장실 하인방 부식, - 별당채 화장실 하인방 부식 - 창호지 오염 및 부식 - 야외마당 수전 설치 요청

4	계동 32-10 (한옥임대주택)	문간채 머거불 및 와구토 탈락
5	계동 2-50 (소반공방)	동판 처마 누수 툇마루 오염 및 마감 불량(면깍기 후 마감도장)
6	원서동 38 (전통홍염공방)	창호 돌쩌귀 파손 회첨골 고삽 및 평고대 누수 흔적(장마철 확인 필요)
7	원서동 41 (단청공방)	대청 우물마루 마룻널 보강 및 고정 대청 좌우 미닫이 문 개폐 불량 뒷마당 외부 수전 설치 및 배수시설 취약
8	가회동 11-32 (북촌한옥청)	문간채 딱지 소로 탈락 와구토 일부 탈락
9	가회동 11-18 외 3 (금박연)	화단 정비 및 수목 전지 필요 – 마당 기단석 처짐(드잡이) 측면 마당 오픈 배수로 설치 - 선홈통 연장 설치 담장 기와 일부 보수
10	가회동 11-91 외 1 (전통공예체험관)	대청 마룻널 이격 및 소음발생 대청 내부 벽체 일부 들뜸 외부 반침 기둥 하부 누수 과실수 정전 필요, 동판 처마 이음부 탈락
11	가회동 11-22 외 1 (한옥협동조합)	특이사항 없음, 대문 심방목 지속 점검 필요
12	가회동 11-7 (동림매듭공방)	출입구 화단 정비 및 바닥 판석 설치 툇마루 동자기둥 설치 회첨골 부위 동판처마 누수 – 마당 소나무 전정

□ 향후계획

○ ‘21. 3.15. ~ 4.15.  : 서울 공공한옥 유지보수 공사 시행

○ ‘21. 4.30.            : 공사 결과 점검 및 준공

□ 소요예산 : 약 36,600천원

○ 예산과목

− 도시재생실 한옥건축자산과, 한옥건축자산보전진흥, 전통문화계승발전(일반), 한옥지원센터 운영 및 한옥 공공한옥 조성사업, 시설비

붙임 : 설계내역서 1부.  끝.