문서번호	안전조사과-2499
결재일자	2021. 3. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	안전조사과장
장기덕	03/09 김분숙
협 조

″상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수″

활성탄 흡착지 시설개선 사업추진 점검 중간보고

2021. 3.

상수도사업본부

(안전조사과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

활성탄 흡착지 시설개선 사업추진 점검 중간보고

정수센터의 안전한 수질관리와 시민들이 안심하고 마실수 있는 아리수 공급의 주요공정인 활성탄 흡착지 시설개선 사업을 점검하고 그 결과를 보고 드림.

□ 활성탄 흡착지 시설개선 점검 현황

○ 점검기간 : ‘21. 3. 5. ~ 3. 8.(기간 중 2일)

○ 점검인원 : 안전조사과 직원(3개조 3개반 편성)

○ 점검사항 : ********** 공사 추진 현황

○ 공사 추진 현황

연번	사업명	주관 부서	예산액 (백만원)	발주/계약의뢰	계약 (예정)	준공 (예정)	추진사항
1	활성탄지역세척 소독수 변경공사	광 암	280	’21. 3.	‘21.3	4월말	- 4월 완료예정(염소투입기포함)
		암 사	60	‘21.3.9.	(‘21.3.26.)	(4~5월)	- 염소투입기 제외한 공사완료 (4월말) - 염소투입기 제작구매 기간 (4주~8주 기간 예정으로 4월말~5월초 완료 예정)
		영등포	260	‘21.3.4.	(‘21.3.26.)
		강 북	300	‘21.3.2.	(‘21.3.20)
2	활성탄지역세척 회수펌프증설	암 사	1,249	‘21.2.11	‘21.3.10	‘21.3.30	- 토목,기계,전기분야 각각 발주로 3월말까지 공사완료
3	활성탄지위생전실 보완(ISO관련)	6개 정수장					- 3월 중순까지 전원 정비완료 (뚝도, 강북, 영등포 : 기 완료)
4	활성탄지 출입관련 전동 방독면 구매	6개 정수장					- ‘21.3월 구매 완료 (6개 정수장)

□ 유충 관련 추진사항 점검

○ 본부 : *****수돗물 수질관리 실행계획(수질과-1821, 2021.2.19.)

- 전 사업소 ******TF 팀 구성 및 운영 추진계획 수립 시행(3월)

- 주말, 공휴일 등 ** 모니터링 시행 중

○ 조치사항

- ******공사발주 : 계약심사 단축, 긴급공고(안전조사과→계약심사과, 사업소)

- 본부 주관부서의 ***** 대응 표준매뉴얼 작성 및 조치요령 등

세부사항의 조속 추진과 당초 일정의 계획변경 필요

(3월 기온이 평년보다 높을 것을 전망되어 ***** 시기가 빨라짐)

- 수목, 방충망, 위생전실, 포충기 위치 등 통일된 세부기준 수립 필요

끝.