문서번호	토목부-4574
결재일자	2021. 3. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
김선배		최진우	03/10 김용제
협조

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토보고 (5회)

2021. 3.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토보고(5회)

「올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 공사」의 책임건설사업관리기술자로부터  물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토보고가 있이 이에 대한 보고임

Ⅰ		관련 근거

○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정(5회) 검토보고

【올대감 21-50(‘21. 3. 3.)호】

Ⅱ		사업 개요

○ 사 업 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

○ 공사위치 : 송파구 풍납동 일대

○ 사업규모

- 램프신설 : L=1,383m (교량 446m 포함)

- 램프이설 : L=1,309m (교량 139m 포함)

- 올림픽대로 이설 : 하남방향(L=1.21km), 김포방향(L=1.16km)

○ 사업기간 : 전체‘16. 4. 1. ~ ‘21. 12. 31.

○ 총사업비 : 전체 50,791백만 원 (‘20년 : 11,200백만 원)

○ 감리사/시공사 : ㈜이산외 2개사 / ㈜덕일외 2개사

○ 공 정 율 : 70.6%

Ⅲ		추진 경위

◦ '18.11.16. : 민원접수(올림픽현대아이파크)

- 민원내용 : 한가람로를 통한 올림픽대로 접근성 확보

◦ '19.05.31. : 제1차 사업계획변경 조정심의회 개최(행정2부시장외 6명)

- 심의결과 : 교통편익과 안전을 확보하는 방안으로 계획변경 “적정”

◦ '19.06.10. : 사업계획 변경(도로계획과)

◦ '19.08.    : 한가람로 진입램프 기본 및 실시설계 착수

◦ '19.11.29. : 주민간담회 개최

◦ '20.09.    : 한가람로 진입램프 기본 및 실시설계 완수

◦ '21.01.    : 한가람로 진입로 공사를 위한 올림픽대로 교통전환 완료

◦ '21.02.~  : 한가람로 진입로 공사 진행 중

Ⅳ		관련근거 및 검토내용

□ 관련근거

◦ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조, 동법시행령 제73조 및 시행규칙 제72조

⦁기간요건 : 계약을 체결한 날부터(2차 이후의 계약금액 조정의 경우에는 직전 조정기준일로 부터) 90일 이상

⦁등락요건 : 입찰일기준으로 100분의 3이상 증감된 경우

◦ [지방자치단체 입찰 및 계약집행기준]제13장.공사관리일반조건(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

⦁준공대가(장기계속계약의 경우는 각 차수별 준공대가) 수령 전까지 조정신청을 해야 조정금액을 지급

□ 계약변경현황 및 금회ES적용내역

**	*****		****		***
	**	**	**	**
*********	**************	*************	*	****
*********	**************	*************	*	*******
*********	**************	*************	*******	*******	****
*********	**************	*************	*	****
*********	**************	*************	*******	*******	****
*********	**************	*************	*******	*******
*********	**************	*************	*******	*******
*********	**************	*************	*	****
*********	**************	*************	*******	*******	****
*********	**************	*************	*	*******
*********	**************	*************	*******	*******	****
*********	**************	*************	*	****
*********	**************	*************	*******	*******
*********	***************	**************	*******	*******
*********	***************	*************	*	****
*********	***************	*************	*******	*******	**** *****
*********	***************	*************	*	*******

□ 검토내용

◦ 물가변동현황 및 금회물가변동 조정신청 내용

***	****	****	****	****	****	**
************	****	****	****	****	****
*************	***********	***********	***********	***********	***********
***********	*****	*****	*****	*****	*****
************	************	************	************	************	***********

◦ 계약금액 조정요건 검토(기간요건 및 등락요건 동시충족)

- 기간요건 : 직전조정일로 부터 90일 이상(548일) → OK

- 등락요건 : 직전조정일로 부터 100분의 3이상(3.46%)   → OK

**	**** ***	**** ***	**** ****	*** ***	****	**
****	**********	**********	****	*****	********** **********

◦ 물가변동 대상금액 검토

- 대상금액 = 조정기준일 당시 산출내역서 – 물가변동 적용제외금액

= 34,180,800,000원 – 31,858,586,703원 = 2,322,213,297원

***	**	****	****	****	****	****	****	****
**	***	******	******	******	******	******	******	*****
***	*		***	*****	*****	*****
**************************************************************

「물가변동 적용대상 요약도」

********

◦ 물가변동 적용지수 검토

- 지수조정율 : 3.46% ⇒ 지수조정율 3%이상으로 적용기준 충족함

「지수조정율 산출서」

***	******** ***	***** ***	***** ***	*** ***	**
**** ****	*************	******	*****	*********
**** ****	*********	******	*****	*********
**** ****	*********	******	*****	*********
*	*************	*******	*	*****

* 기존공종(K0) : `19.07.01(직전조정일)일로부터 ~ `20.12.31(조정기준일)일까지의 조정률 = 3.47%

* 신규공종(K1) : `19.11.25(설계변경일)일로부터 ~ `20.12.31(조정기준일)일까지의 조정률 = 3.15%

* 신규공종(K2) : `19.12.11(설계변경일)일로부터 ~ `20.12.31(조정기준일)일까지의 조정률 = 3.35%

◦ 계약금액 조정내역 검토

***	*******	***
*******************	***************	******* ***********
****************	***************	****
**************	**************	*****
*************	*****
*******************	***********	*****
*************	*	****
****************	***********	*****

Ⅴ		감리단 검토의견

◦ ********************************************************************************************

Ⅵ		조 치 계 획

○ ****************************************************************************************************

붙 임  책임건설사업관리기술자 검토보고서 1부.  끝.