코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	광진구청장(도로과장)
(경유)
제목	양진초 보행로 개선 추가 공사비 요청에 대한 회신

1. 광진구 도로과-3181(2021.3.8.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 추가공사비 요청건에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 사업명 : 양진초 보행로 개선 사업

나. 사업예산 : 380백만원 (사고이월사업)

다. 추가요청 사업비 : 70백만원

라. 검토결과

○ 양진초는 스쿨존 532 대상사업으로 30km/h→ 20km/h로 변경추진하여 물리적으로 차량속도를 저감할수 있도록 안전표지, 노면표시 등을 개선

○ 추가 사업비는 미확보한 실정이므로 블록포장하부는 자문내용에 따라 변경없이 진행함이 타당할 것으로 판단됩니다. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	유용식		보행안전팀장	이상학		보행정책과장	전결 03/11 이상국
협조자
시행	보행정책과-3306	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 6층	/
전화	02-2133-2423	/전송	02-2133-1052	/	9988dyd@seoul.go.kr	/	대시민공개