문서번호	정수과-734
결재일자	2021. 3. 11.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
구연회		이순재	03/11 신동호
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수시설과장			백상희
	주무관			조성연
	주무관			이기만

- 2021년 유해화학물질 취급시설 -

정기·설치검사 등 도서 작성 용역 시행 계획

2021. 3.

강북아리수정수센터

정수과

- 2021년 유해화학물질 취급시설 -

정기·설치검사 등 도서 작성 용역 시행 계획

유해화학물질 취급시설 정기·설치검사 및 2022년 안전진단 대비「화학물질관리법」시설기준에 적합토록 사전 서면 검사 자료 작성에 만전을 기하기 위해 정기·설치검사 등 도서 작성 용역을 추진하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 관련근거

❍ 화학물질관리법 제24조 및 같은법 시행규칙 제23조, 제24조

∙ 유해화학물질 취급시설 설치검사

- 화학물질관리법 제24조제2항 및 같은법 시행규칙 제23조제1항

∙ 유해화학물질 취급시설 정기검사

- 화학물질관리법 제24조제3항 및 같은법 시행규칙 제23조제2항

∙ 유해화학물질 취급시설 안전진단

- 화학물질관리법 제24조제5항 및 같은법 시행규칙 제24조제1항

❍ 유해화학물질 취급시설의 설치·정기·수시검사 및 안전진단의 방법 등에 관한 규정 [환경부고시 제2019-157호, 2019. 8. 31.]

□ 안전검사별 주기 및 기관

구 분	주 기	검사대상	이전 검사일	검사예정일	검사기관	비 고
설치검사	설치시 마다	유해화학물질 취급시설 변경시	‘19.11.15. 취급물질변경	2021. 4. 2021. 5.	한국가스 안전공사 (인천지역본부)	검사결과서 환경부 제출 (한강유역환경청)
정기검사	1년	유해화학물질 취급시설 전체	‘20.9.28. 적합	2021. 9.
안전진단	4년		‘18.7.27. 장외영향평가 적합	2022. 7.

□ 검사대상 유해화학물질 취급시설

약 품 명	시 설 명	저 장 용 량	용 도	2021년 변경사항
가성소다 (NaOH)	실외 저장시설	100㎥×2기(50%) 100㎥×3기(20%)	pH 조절제	축소 (5기→4기)
	실내 사용시설 - 약품실	3㎥×8기(20%)		-
	실내 사용시설 - 희석조실	55㎥×2기(20%)		-
	실내 사용시설 - 염소실	10㎥×1기(20%)	염소가스 중화	-
염 소	실내 사용시설	19톤×1기	소독제	증설(소량) (염소투입설비)
과산화수소	실내 사용시설	4.9톤×8기	산화제/잔류오존처리	-
☞ 각 유해화학물질별 중화·투입설비 및 배관·펌프 등 부대시설 포함

Ⅱ		추진계획

□ 용 역 명: 2021년 유해화학물질 취급시설 관련 도서 작성 용역

□ 용역기간: 계약일로부터 ~ 10. 31.

□ 과업대상: 강북아리수정수센터 유해화학물질 취급시설 전체

(배관, 펌프 등 부대시설 포함)

□ 용역내용 (붙임1. 과업지시서 참고)

❍ 유해화학물질 취급시설 정기·설치검사 서면심사 자료 작성

- 관련 법규에 적합하게 작성

❍ 유해화학물질 취급시설 정기·설치검사 및 취급시설 개·보수 기술지원

- 설치검사 기술 지원 및 보완사항 발생 시 추가 자료 작성

- 설치검사 취급 시설 변경 사항 서면자료 작성

- 취급시설 정기·설치검사시 참석

❍ 유해화학물질 취급시설 안전진단 대비 기술지원

- 2022년 유해화학물질 취급시설 안전진단 대비 배관 두께 측정 실시 및 관련 일부 자료 작성

❍ 장외영향평가 변경관리

- 유해화학물질 취급시설(소량)의 증설 및 취급시설 변경 관련 장외영향평가서 변경내역서, 변경도서 작성

□ 추진일정(안)

용역계약	□	착수보고회	□	설치검사 도서작성	□	도서심사 및 현장조사	□	설치검사결과보고서 제출
-		사업주		사업주		한국가스 안전공사		한강유역 환경청
’21.3.		’21.3.		’21.3.~4.		’21.4.~5.		’21.5.

□

용역준공	□	정기검사결과보고서 제출	□	도서심사 및 현장조사	□	정기검사 도서작성	□	중간보고회
-		한강유역 환경청		한국가스 안전공사		사업주		사업주
’21.10.		’21.10.		’21.8.~9.		’21.6.~8.		’21.6.

□ 추진방법

❍ 계약방법: 수의계약

❍ 계약근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호 “나”목 규정에 따른 수의계약

- 용역 추정가격이 1,500만원 이하로, 1인 견적 제출 수의계약 가능

- 2개 이상 업체로부터 견적서를 제출받아 최저가를 제시한 업체와 계약 추진

❍ 계약업체(안)

- 상    호: 라온안전(대표 차유미)

- 소 재 지: 경기도 광명시 새빛공원로 67, A동 1817호

- 연 락 처: ☏ 02-2088-8712 (E-mail: laon0107@naver.com)

❍ 소요예산

- 산출금액: 14,630천원 (부가세 포함)

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

- 산출내역: 붙임2. 산출기초조사서 참조

Ⅲ		행정사항

□ 유해화학물질 취급시설 중 건축·토목·전기·기계시설 등 업무 담당

❍ 도서 작성 용역 보고회 및 현장조사시 참석

❍ 도서 작성 관련 도면 등 자료제출 및 보완사항에 대한 시정처리

□ 정기·설치검사 신청: 검사희망일 기준 검사기관(한국가스안전공사) 담당자와 협의

□ 검사결과보고서 제출: 환경부(한강유역환경청)

붙임  1. 과업지시서 1부.

2. 유해화학물질 취급시설 사전서면 검사서류 목록 1부.

3. 산출기초조사서 1부.

4. 견적서 3부.  끝.