문서번호	도로보수과-2272
결재일자	2021. 3. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
이현화		이화신	03/12 고영준
협조

2021년 노면표시 유지보수공사(연간단가) 시행 계획

2021. 3.

북부도로사업소

도 로 보 수 과

『2021년 노면표시 유지보수공사』시행계획

우리사업소에서 유지․관리하고 있는 교통안전시설물(노면표시) 퇴색구간 재정비 및 경찰청 규제심의 개선사항 등에 대한 유지보수공사를 시행하여 교통안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

관련근거

❍ 예산 재배정 : 도로관리과-1054호(2021.01.20.)

- 예산배정금액 : 760,000천원

❍ 2021년 계약심사 완료 : 계약심사과-2697호(2021.02.17.)

노면표시 현황

합 계 (km)	문자표시 (km)	횡단보도 (km)	안전지대 (km)	방향표시 (km)	차 선(km)				비고
					계	백색	황색	청색
2,142	208	774	31	161	968	399	520	49

공사추진 계획

❍ 공 사 명 : 2021년 교통안전시설물(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

❍ 공사기간 : 착공일로부터 ~ 2021. 12. 31일 까지

❍ 공사규모 : 차선도색 161.6km, 차선제거 19km, 표지병설치 28개소

❍ 소요예산 : 759.3백만원

- 도급비 622.1백만원, 관급비 137.2백만원

❍ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(실적 및 지역제한)

- 건설산업기본법 시행령 제7조에 의한 전문건설업종 중 도장공사업 면허를 등록한 업체로서 주된 사무소가 서울특별시에 소재한 업체

※ 추정가격 10억원 이하인 전문공사 지역 제한 가능

- 도로법상 도로관리청이 관리하는 모든 도로와 도로교통법상 유료도로로서 현실적으로 불특정다수가 이용하는 도로의 교통안전시설공사(노면표시도색) 실적이 입찰 공고일 전일기준 최근 10년이내 단일공사 준공금액이 3,000만원 이상인 도장공사 실적을 갖춘 업체

※ 차선도색(노면표시)공사는 특수한 기술이나 공법이 요구되는 공사에 해당되므로 중복(실적+지역)제한 가능함.

❍ 시행방법

- 서울시 노면표시 공사설계설명서(시방서)에 의거 공사 시행

- 서울지방경찰청 교통안전시설 개선설치에 따른 규제심의 사항 정비

- 도로순찰 및 민원에 의한 현장 점검시 벗겨짐이나 오염 등에 의해 선명하지 못하거나 퇴색되어 시인성이 현저하게 떨어졌을 경우 재도색 시행

- 연간단가 공사이므로 차수별 작업지시에 의하여 공사를 시행하되, 긴급사항 발생시에는 선 작업하고, 사후 문서작업지시

❍ 설계내역서: 별첨 참조

설계기준

❍ 환율적용 (2021.1.2일자 고시환율) : 1,088.0원 적용

❍ 유가적용 (계약심사결과 반영)

- 휘발유 : 1,390.8원 적용

- 경  유 : 1,210.8원 적용

❍ 노임적용 (2021년 상반기적용 건설업 임금실태조사보고서 단가)

❍ 표준품셈 차선도색 내용을 적용하고 사용자재는 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제12조 및 동법 시행령 제11조의 규정에 따라 관급자재로 설계

자재구매 계획

❍ 규   모 : 노면표지용 융착식 도료 4,473포

- 백색 3,358포, 황색 1,115포

❍ 소요예산 : 관급비 137.2백만원

❍ 계약방법 : 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁 “ 표준방식Ⅱ”

- 중소기업자간 경쟁제품으로서 납품요구대상금액이 1억원 이상

❍ 규  격 : P4(R5)

- 제품 성능 검증을 위한 시험시공 및 모니터링(2015.10.~2016.04.) 결과 가격대비 효율성 및 경제성이 우수한 제품 구매

(참고 : 내마모도 시험과 재귀반사값(휘도)은 상호 관련성이 없음)

- 내마모도 시험(50만회), 백색(P4), 노란색(P4), 파란색(없음)

▸ 파란색의 경우 관급제품이 없으므로 백색(관급) + 청색 안료(내역서 포함) 구매

※참고 : 등급 기준 : P3(20만회), P4(50만회), P5(1백만회), P6(2백만회), P7(4백만회)

예산과목

❍ 안전총괄실 도로관리과,도로시설물 관리,도로 및 도로부속물 관리, 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

붙임 : 1. 설계서 1부.

2. 예산재배정 통보 1부.

3. 계약심사결과 1부.  끝.