문서번호	수상안전과-1549
결재일자	2021. 3. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수상안전과장	운영부장		한강사업본부장
최윤정	윤재한	이용우		03/12 신용목
협 조	총무과장		이상이
	기획예산과장		안인숙

2021년 관공선(예인선 3척)

선박안전검사 및 수리 계획

2020. 3.

한강사업본부

(수상안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□	선박안전법에 따른 안전검사
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■	검사기관 한국해양교통안전공단
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

예인선(3척) 선박안전검사 및 수리 계획

예인선(3척)의 선박안전법 제9조(중간검사) 검사기준일에 따른 검사 및 수리를 실시하여 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

추진근거

○ 선박안전법 제9조(중간검사)

○ 수상안전과-118(2021.1.7.)‣2021년 관공선 운영·관리 계획

추진대상

선명	선체규모(m) 길이 x 폭 x 깊이	톤수	선종	재질	건조일
서울713호	11.3 x 4 x 1.6	10톤	예인선	강(철재)	1998.08.29
서울714호	11.3 x 4 x 1.6	10톤	예인선	강(철재)	1998.08.29
서울716호	11.3 x 4 x 1.6	10톤	예인선	강(철재)	1998.08.29

□ 소요예산 : 금181,500천원(부가세 별도)

Ⅱ		추 진 계 획

□ 검사계획

○ 검사종류 : 제1종 중간검사

○ 검사기간 : ’21.4.21. ~ 5.15.(25일)

- 검사기준일 : 2020.7.22.~2022.01.22.

○ 검사기관 : 한국해양교통안전공단(KOMSA), 서울지부

○ 소요예산 : 금1,000천원

○ 검사방법

- 선체검사는 상가하여 수검

- 기관검사는 주기관, 추진기, 기타설비 수검 및 시운전

□ 검사를 위한 수리 계획

○ 수리대상 : 예인선 3척(서울713호, 714호, 716호)

○ 수리기간 : ’21.4.21. ~ 5.15.(25일)

○ 수리방법 : 제한경쟁입찰에 따른 수리업체 선정

- 입찰자격 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조         요건을 갖추고 공고일 현재 주사무소가 서울특별시 또는 인천광역 또는 경기도         내에 소재한 선박건조 또는 선박수리에 관한 업종으로 공장등록을 필한 업체

○ 소요예산 : 금180,500천원(부가세 별도)

- 예산과목 : 한강 관공선 등 운영 및 관리, 시설비

○ 수리내용

- 선체 수리

· 선박 상가 후 도장작업 및 아연판 교체, 외판 등 수리

· 소화설비, 무선설비, 구명장비, 항해계기 등 점검 및 수리

- 기관, 추진기 수리

· 주기관, 감속기의 필터, 윤활유 교환 및 작동상태 점검(Yanmar 2대)

· 펌프, 밸브, 연료탱크 등 분해, 소제, 작동상태 점검

· 추진기 수리 및 부품 교환, 작동상태 점검(Hamilton w/jet 2대)

○ 추진일정

- ’21. 03. 15. ~ 03. 23. : 사전규격공고 및 계약의뢰

- ’21. 03. 24. ~ 04. 20. : 입찰공고 및 계약체결

- ’21. 04. 21. ~ 05. 15. : 선체·기관 수리

Ⅲ		행 정 사 항

○ 사전규격공고, 계약 체결   : 총무과, 재무과

○ 선박 안전 검사            : 한국해양교통안전공단

붙임  선박검사증 3부, 견적서 5부.  끝.

참고

수상안전과 관공선 현황

(2021. 3. 10. 현재)

관 리 부 서		선 명	제 원					주 용 도	건조일	비고
소관부서	배 치 별		톤급	주요치수(m) (길이x너비x깊이)	선종	승선 정원	재질
수상 안전과 (15척)	- 여의도 관공선 사무실 (6척)	한강아라호	688	55.5x12x2.5	홍보선	310	강(철제	홍보,행정	10.10.20	임대중
		한강르네상스	194	37x9x2.5	홍보선	77	강(철제)	홍보,행정	09.07.01
		서울 504호	24	17.5x4.5x1.7	홍보선	33	FRP	홍보,행정	97.03.14
		서울 506호	2.5	7x2.4x1.2	행정선	7	FRP	순찰	05.09.05
		서울 507호	2.8	6.4x2.5x1.5	모터보트	11	FRP	순찰	10.01.01
		서울 508호	6.7	9.48x3.36x1.94	모터보트	12	FRP	순찰	17.11.24
	-마포지대 ① 예인선 (3척) ②부선(6척)	서울 713호	10	11.3x4x1.6	예인선	4	강(철제)	도강긴급	98.08.29
		서울 714호	10	11.3x4x1.6	예인선	4	강(철제)	도강긴급	98.08.29
		서울 716호	10	11.3x4x1.6	예인선	4	강(철제)	도강긴급	98.08.29
		서울7211호	21	19.1x6.5x1.5	부선	-	강(철제)	도강긴급	98.09.21
		서울7212호	21	19.1x6.5x1.5	부선	-	강(철제)	도강긴급	98.09.21
		서울7213호	21	19.1x6.5x1.5	부선	-	강(철제)	도강긴급	98.09.21
		서울7214호	21	19.1x6.5x1.5	부선	-	강(철제)	도강긴급	98.09.21
		서울7217호	21	19.1x6.5x1.5	부선	-	강(철제)	도강긴급	98.09.21
		서울7218호	21	19.1x6.5x1.5	부선	-	강(철제)	도강긴급	98.09.21
제외선박	위탁관리	한강거북선	178	23.94x8.49x2.79	거북선	12	FRP	교육,관람	90.09.01