문서번호	서울특별시농업기술센터-3135
결재일자	2021. 3. 15.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관	기획홍보팀장	농업교육과장	농업기술센터소장
정영환	진우용	강금완	03/15 조상태
협 조
	기술보급과장		이연미
	도시농업팀장		정재효
	환경농업팀장		황영주
	주무관		한지예
	주무관		박상훈

청사 안전관리를 위한 옥상 방수공사 추진 계획

청사 안전관리를 위한

옥상 방수공사 추진 계획

2021. 3.

서울특별시 농업기술센터

청사 안전관리를 위한

옥상 방수공사 추진 계획

여름철 우기 대비로 옥상 방수공사를 실시하여 건물을 안전하게 유지관리할 수 있도록 만전을 기하고자 함

□ 현황 및 검토

○ 공사장소 : 농업기술센터 청사 옥상

- 옥상면적 : 617㎡(약 187평)

- 방수면적 : 755㎡(약 228평, 바닥면적과 수직면적 포함)

○ 검토 및 개선

- 청사 건물은 2005년 준공 이래 부분 시트 방수를 제외하고 전면 방수를 실시한 적이 없어 금년 풍수해 대비 보강이 시급

⇒ 전면 방수공사 실시(건물 누수 방지 효과)

< 청사 옥상 현황 사진 >

< 노후 시트방수지 >

< 옥상 방수시공 사례>

- 청사 옥상 공간을 활용 중인 양봉자재 및 옥상과수 재배 연구시설물(목재상자화분)은 해체 및 이전 추진(노후 건물 안전을 위한 방수작업 시급성 고려)

⇒ 양봉 교육사업 자재  : 이전 조치(환경농업팀)

⇒ 옥상 과수 재배 화단 : 해체 추진(도시농업팀)

< 옥상 활용 공간>

□ 공사 추진계획

○ 청사 옥상 방수공사 발주

- 총 소요예산 : 50,000천원

- 공사내역 : 노후 시트방수지 제거, 바탕처리, 우레탄 방수 작업

- 예산과목 : 도시농업활성화, 시민교육을 위한 기반확충, 시설비

○ 공사 내역

구분	공사발주	공사내역	소요금액	비 고
계		49,559,000원
1	시트방수층 제거	시트층 제거 및 정비	10,133,000원
2	바탕면 처리	방수 전 정비 작업	9,006,000원
3	도막방수 등	폴리우레탄 도막 작업	30,420,000원

□ 향후 추진

○ 발주 및 계약 : ‘21. 3. 17. ~ 3. 22.

- 계약방법 : 수의계약

- 계약사유

•지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』제25조 제1항 제5호 및 마목에 의한 서울시 소재 여성기업으로

•원가설계금액보다 적은 공사비를 제시한 건설업체와 계약

○ 옥상 화단 등 정비 :  ~ ‘21. 3. 22.

○ 공사 및 준공 : ‘21. 3. 23. ~ 4. 10.

붙임  1) 설계내역서 및 공사시방서 1부.

2) 공사 견적서  1부.  끝.