문서번호	기전과-1897
결재일자	2021. 3. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
박상갑		석대창	03/16 변봉섭
협조	주무관		김해중
	주무관		이정호

『이수역 쿨링로드 설치』계획

2021. 3.

남부도로사업소

(기  전  과)

이수역 쿨링로드 설치 계획

쿨링로드 시스템을 설치하여 도심 열섬현상을 완화하고 도로상 먼지를 제거하여 쾌적한 도로 환경을 조성하고자 합니다.

1		추 진 배 경

○ 폭염대비 클린로드 설치 기본계획(도로관리과-11210호, 2020.07.15.)

○ 쿨링로드 운영기준 알림(도로관리과-3248, 2021.02.25.)

○ 이수역 쿨링로드 수질검사결과 회보(물환경연구부-2365, 2021.03.12.)

2		사 업 개 요

○ 사 업 명 : 이수역 쿨링로드 설치

○ 사 업 비 : ******

○ 사업내용 :

- 쿨링로드 실시설계

- 분사노즐 및 밸브 설치

- 펌프(2대) 및 배관 설치

- 원격제어 및 모니터링 시스템(노면온도, 미세먼지) 1식

- 안내전광판(1대) 및 CCTV(1대) 설치

※ 업체의 제안 내용에 따라 변경 가능

○ 기    간 : 2021. 3. ~ 2021. 8.

○ 위    치 : 이수역 일대 300m 구간

<이수역 일대 300m 구간>

○ 예산과목

- 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 노후 포장도로 정비, 클린로드 시설 확충

3		추 진 계 획

□ 분야별 발주계획

구 분	체결 방식	금 액	비 고
물품 제조 및 구매	공동 수급 허용 (분담이행방식)	******	- 계약 방식 : 물품 제조 및 구매
기계 공사
토목 공사
설계 용역
전기 공사	별도 발주	*****	- 설계 완료 후 추진
폐기물 처리 용역

- 분담이행방식 : ‘물품 제조 및 구매’ 분담비율 50%이상

□ 물품 제조 및 구매 계획

○ 건    명 : 이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치

○ 입찰방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약)

- 협상에 의한 계약 : 제안서 평가 결과, 종합평가 점수가 70점 이상인 자를 협상적격자로 선정 후 고득점 순으로 협상 실시

※ 종합평가 항목

구 분	평가 항목	배점	비 고
정량평가	참여기술자, 납품실적, 경영상태, 신인도, 가산점	20	- 발주부서 평가 - 절대 평가
정성평가	과업 이해도, 기술지식능력, 사업관리능력, 추가 제안	60	- 위원회 평가 - 상대 평가
가격평가	입찰 가격	20	- 발주부서 평가 - 절대 평가
합 계		100

→ 종합평가 세부 항목 : ‘붙임’ 참조

○ 입찰 자격조건

대 상	내 용	참가자격
물품 제조 및 구매	쿨링로드 물품 제작 및 납품	쿨링로드 시스템 기술보유 업체
기계 공사	쿨링로드 물품 설치	건설산업기본법 전문공사 : 기계설비 공사업, 상·하수도 설비공사업
토목 공사	터파기 및 되메우기	건설산업기본법 전문공사 : 토공사, 상·하수도 설비공사업
	도로 포장
설계 용역	쿨링로드 실시설계	엔지니어링산업진흥법 전문분야 : 일반산업기계, 상하수도, 토질·지질, 정보통신 및 전력관리기술법 : 종합 또는 전문시설(1종)설계업

○ 계약 기간 : 착수일로부터 90일

※ 전기공사 및 폐기물 처리용역은 별도 발주 건으로서 실시설계 완료 후 추진 예정임.

4		추 진 일 정

○ ‘21.  3.        예산 재배정, 사전규격공개, 계약의뢰

○ ’21.  4.         제안서 접수 및 평가위원회 개최, 기술협상 및 계약체결

○ ‘21.  5.         물품 제작 및 설치(착수)

○ ’21.  8.         준공

붙임 : 쿨링로드 제안요청서 1부. 끝.