문서번호	정수시설과-1924
결재일자	2021. 3. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
배용우		정재현	03/17 최규동
협 조

2020년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)-2차수】

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 3.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

『2020년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)-2차수』시행 중 신규 공종 및 시공 물량 증․감 사항이 발생됨에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하여 심의 완료하고 그 결과를 보고 드림

※ 관련문서 : 정수시설과-1841(2021.3.16)호『【2020년 뚝도아리수정수센터 전기설비            보수공사(연간단가)-2차수】설계변경 심의위원회 개최』

□ 일반현황

◯ 공 사 명: 2020년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)-2차수

◯ 공사개요

구분	당초	변경
전선관	강제전선관 옥내(아연도 22㎜) 2m	강제전선관 옥내(아연도 22㎜) 10m
케이블	F-CVVS 3C 1.5㎟ 0m	F-CVVS 3C 1.5㎟ 10m
축전지	-	축전지(100AH-12) 2조(40Cell)
기 타	전극식레벨스위치(SH-3S) 0set	전극식레벨스위치(SH-3S) 1set

- 신규 공종 및 물량 증감 발생(설계변경 내역 참조)

◯ 공사기간(변경없음)

- 당초: 2021. 1. 1. ~ 2021. 3. 31.(총공사기간: 2020. 4. 1. ~ 2021. 3. 31.)

- 변경: 2021. 1. 1. ~ 2021. 3. 31.(총공사기간: 2020. 4. 1. ~ 2021. 3. 31.)

◯ 계약금액

- 당초: ************************************

- 변경: ************************************

◯ 계약상대자: **************

□ 심의 위원회 개최

◯ 심의일정: 2021년 3월 17일(수) 14:30~15:10

◯ 심의장소: 뚝도아리수정수센터 정수시설과

◯ 심의위원장: 정수시설과장 정재현

◯ 심의위원: 시설6 김영후, 공업6 서기석, 시설7 장현순, 공업7 박원석

□ 심의내용

◯ 단가계약공사의 특성상 발생하는 계약물량 증․감에 대한 설계변경 사항

- 수량변동 및 단가 적용의 적정성 여부

- 신규 공종 발생 수량 단가의 낙찰률 적용 적정 여부

- 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

□ 설계변경내역

◯ 계약금액                                                   (단위: 원)

구분	당초	변경	증감
총부기금액	**********	**********	**********
금차계약금액	**********	**********	**********

◯ 계약기간: 변경없음

◯ 신규공종 및 시공물량 증․감에 따른 변경(붙임1 참고)

- 신규 공종 발생: 축전지(100AH-12) 교체 1개 공종 발생

- 공사 중 물량 감소: 접지동봉 16Φ×1800L 설치 등 188개 공종 발생

- 공사 중 물량 증가: 강제전선관 옥내(아연도 22㎜) 설치 등 5개 공종 발생

□ 심의결과

◯ 설계변경의 타당성: 타당함

◯ 신규공종 발생 유무 및 낙찰률 등 단가 적용 타당성: 타당함

◯ 제경비 산정 및 적용의 적정성: 적정함

◯ 계약변동(증·감) 물량 계약단가 적정 적용 여부: 적정함

◯ 각종 제반 규정 준수 여부: 준수

◯ 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토: 적합

□ 조치의견

◯ 상기 심의내용을 반영하여 설계변경 시행하고자 함

붙임 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 심의신청서 및 심의결과서 1부.  끝.