문서번호	치수과-1742
결재일자	2021. 3. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	치수과장	시설부장	한강사업본부장
이호연	최연호	박상보	03/17 신용목
협 조
	기반시설과장			라철흠
	주무관			임영준

- 선유도 보행잔교 및 수상갤러리 설치 -

사업 추진계획 변경 검토 보고

2021. 3.

한강사업본부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 선유도 보행잔교 및 수상갤러리 설치 -

사업 추진계획 변경 검토보고

선유도 보행잔교 · 수상갤러리 설치사업의 효율적인 추진을 위하여 사업 추진계획을 변경 시행코자 이에 대한 검토 보고임.

□ 추진배경

❍ 국내․외 해변 잔교 등을 벤치마킹하여 주변 자원과 연계한 특색 있는 수상시설 설치(‘14. 10. 1, 시장요청사항 제835호)

❍ 노후 등으로 ’15년 이후 가동 중단된 월드컵분수를 수상갤러리로 전환, 볼거리 제공과 관광 명소화(‘19. 01. 30, 부시장방침 제26호)

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

❍ 사업규모

- 보행잔교 : 상부(고정교) 192m,  하부(부교) 158m

- 수상갤러리 : 직경 21m, 높이 10m(월드컵 분수 재활용)

❍ 총사업비 : *****백만원(설계비 포함)

구분	총사업비	2020	2021	2022년 이후	비고
계	*****	*****	*	*****
보행잔교 설치	*****	***	*	*****	치 수 과
수상갤러리 설치	*****	***	*	*****	기반시설과

❍ 사업계획도(공모당선작)

□ 그간 추진경위

❍ ’18.11. ~ ’19. 10. : 보행잔교 타당성 조사 및 기본계획 용역

- 기본계획(안): 폭 6m, 연장 80m(고정교 30m + 부교 50m)

❍ ’19.01.30 : 월드컵분수 활용방안 수립 (부시장방침)

- 선유도 보행잔교와 연계한 「한강 수(水) 갤러리」설치

❍ ’20.01.17 : 설계공모 의뢰 (본부→도시공간개선단)

- 선유도 보행잔교/수상갤러리 개별 사업으로 공모 의뢰

❍ ’20. 1. ~ ’20.  9. : 보행잔교·수상갤러리 설계공모(도시공간개선단)

- 사업규모, 사업간 연계성을 감안 통합 공모 시행

※ 당선작 : 선유의 중점 및 빛의 기둥(****************)

❍ ’20. 11. : 기본 및 실시설계 용역 발주(치수과, 기반시설과 별도 시행)

	설계용역 추진현황
▸용역기간 : ’20.12.3. ~ ’21.9.28 ▸용 역 비 : **************************** ▸용 역 사 : ****************(설계공모 당선자) ※현 공정 : 기본설계 중(공모안 상세검토 및 예정공사비 산출)

❍ ’20. 12. : 월드컵 분수 육상 거치 및 시설 철거 등 기반공사 착공(기반시설과)

- 공사 일시 중지 조치(’21. 1. 28. ~ )

□ 사업 추진계획 변경 검토 (개별사업 → 사업통합)

❍ 설계공모 결과 수상갤러리와 보행잔교 시설물 및 기능이 상호밀접 연계되어 있어 사업의 효율적 추진을 위해 통합 추진

- 수상갤러리 조형물이 보행잔교 구조물 내부에 위치, 수상갤러리 진입데크가 보행잔교 교각에 고정연결되어 거동하는 형식

- 공사의 공정․안전관리, 예산의 효율적 집행, 하자책임 구분 등 고려시 통합 추진 필요

❍ 사업통합에 따른 총사업비 증가로 투자심사 절차 이행 후 추진

- 당초 개별사업별 사업비가 적어(40억원 미만) 투자심사없이 사업 추진하였으나 사업통합 추진할 경우 사업비 증가로 투자심사 필요

- 설계공모에 따른 기본설계 결과 단위 사업별 사업비 증가로 개별사업으로 추진하여도 투자심사는 필요한 실정임.

《사업비 증가 현황》

(단위 : 백만원)

구 분	총 사 업 비		비 고
	당 초	변 경
합 계	*****	******	*******
보행잔교	*****	*****	*******
수상갤러리	*****	*****	*******

❍ 투자심사를 위한 타당성조사 추가, 투자심사 완료시까지 현재 진행 중인 기본 및 실시설계 용역 잠정 중단 조치

- 사업의 비용과 편익 분석을 위한 타당성조사는 현재 시행 중인 기본 및 실시설계용역의 과업내용을 변경(추가)하여 시행

- 추가과업 용역비**********는 「월드컵분수 육상거치 및 시설철거 등 기반시설공사」설계변경(물량 감조정) 후 확보

- 투자심사 결과에 따라 사업규모, 추진방향 등 조정 가능성을 고려하여 진행 중인 기본 및 실시설계 용역은 잠정 중단 필요

□ 향후 추진계획

❍ ’21. 05. : 통합사업 타당성조사 시행

❍ ’21. 06. : 투자심사 심의

❍ ’21. 12. : 설계용역 완료 (투자심사결과에 따라 용역기간 조정)

❍ ’22. 01. ~ : 공사시행

붙임 1.추가과업비 산출내역 1부.

2.총사업비 산출내역 1부. 끝.