문서번호	박물관과-3019
결재일자	2021. 3. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		한식문화공간조성추진반장	박물관과장
남광연		이병두	03/17 이성은
협조
	주무관		문경덕

「삼청각 별채 리모델링 공사」

준공기한 연장 검토보고

2021. 3.

문 화 본 부

(박물관과)

「삼청각 별채 리모델링 공사」

준공기한 연장 검토보고

『삼청각 별채 리모델링 공사』와 관련하여 한옥 별채 지붕 공사 추가에 따른 공기연장 과업기간을 연장하고자 함.

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 삼청각 별채 리모델링 공사

○ 공사기간 : ’20. 10. 27. ~ ’21. 3. 26.

○ 설 계 자 : ㈜지유에이건축사사무소 (대표:배구화)

○ 시 공 자 : ㈜현강종합건설(건축,기계), ㈜넥슨정보통신(전기)

○ 감 리 자 : ㈜이이케이건축사사무소 (건축), ㈜펨코엔지니어링(전기·통신·소방)

□ 추진 경위

○ ’20. 10. 27.	: 공사 계약

○ ’20. 10. 28.	: 공사 착공

○ ’21.  1. 28.    : 한옥 별채 지붕공사 실정보고 승인

○ ’21.  3. (현재)	: 내부 마감공사 진행 중 (공정률: 93%)

□ 관련 근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 및 14장 계약 일반조건 제8절 2.계약기간의 연장

○ 현강 제20*******01(2021.3.15.)호: 삼청각 별채 리모델링 건축공사 공사기간 변경(연장) 검토 및 승인요청

○ NEXN-*******01(2021.3.10.)호: 전기공사 공사기간 연장 요청

○ 삼청각 제*******3(2021.3.16.)호: 삼청각 별채 리모델링 전기공사 및 관급자재 공사(납품)기한 변경 검토 보고

□ 계약 변경

○ 공사 및 용역 계약기간 현황

계약명(계약상대자)	구 분	당 초	변 경	비 고
************* *********	****	***********************	***********************	****
	****	*********	**	*******
**************** *********	****	***********************	***********************	****
	****	*********	**	****
********************* *************	****	***********************	***********************	****
	****	********	**	****

*********************************************

○ 귀책사유: 서울특별시(지체상금 미부과)

- 한옥 지붕 누수 발생 및 지붕 목부재 노후로 인한 한옥 별채 지붕공사 추가(1개동 ⇒ 4개동)로 인한 건축공사 기간연장(증 30일)

- 건축공사 기간연장에 따른 전기공사 및 감리용역, 관급 자재(냉난방기, 등기구, AV장치 등) 납품기한 연장(~2021.4.25.)

□ 향후 계획

○ ’21. 3.	: 재무과 계약변경 의뢰 / 변경계약 체결

○ ’21. 4. 25.	: 공사 준공

붙임  1. 건축공사 공사기간 연장요청 공문 1부.

2. 전기공사 및 관급자재 납품기한 연장 검토보고(공문) 1부.

3. 건축사감리용역 계약기간 연장 합의각서 1부.  끝