문서번호	설비부-3397
결재일자	2021. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
강민우	김오열	03/15 김중영

『광역소공인특화지원센터 건립 통신공사』

관급자(네트워크스위치) 계약취소 검토보고

2021. 3.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『광역소공인특화지원센터 건립 통신공사』

관급자재(네트워크스위치) 계약취소 검토보고

건설사업관리단으로부터 관급자재(네트워크스위치) 구매계약 취소 요청이 있어 검토 결과, 계약제품의 계약유효기간 만료로 취소가 필요하며 동일업체(동일제품) 재등록 후 재구매코자 보고 드림

1		공사개요

□ 공 사 명 : 광역소공인특화지원센터 건립 통신공사

□ 위    치 : 서울특별시 성동구 아차산로 17길 9

□ 규    모 : 지하2층/지상7층, 연면적 2,711,51㎡ 신축

□ 기    간 : 총차 ’20.08.12.~’22.08.11.(1차  ’20.08.12.~’21.08.31.)

□ 공 사 비 : *******************************

□ 도 급 사 : 중앙씨앤티(주)

□ 감 리 사 : ㈜포스코에이앤씨 외 1개사

2		관련근거

□ 건설사업관리단 관급자재 계약취소 요청 : 광역CM-0101호

3		검토내용

□ 관급자재 계약현황

○ 계약건명 : 광역소공인특화지원센터 건립 전기공사(네트워프스위치 구매)

○ 계약방법 : 다수공급자계약

○ 계약 세부내역

납품요구번호 (계약번호)	품 명	계약자	계약금액	납품기한
**************** *****************	*****	******	**********	**********

□ 계약해지 및 재계약 사유

○ 선행공종(건축) 공정에 따른 상기 관급자재 설치시기 미도래로 납품기한을 연장하여야 하나

○ 조달청과 제조업체간 계약기간 만료로 납기연장이 불가하여 기존 계약해지 후 재계약

4		감리단 기술검토 의견

□ 본 공사의 관급자재는 납품시점이 도래하지 않았으며, 조달청과 제조업체간 계약기간 만료로 연기가 불가하므로 구매계약 취소 후 재발주함이 타당함

5		보고자 조치의견

□ 계약부서에 관급자재(네트워크 스위치)구매계약 취소를 의뢰하고 향후 선행종공(건축) 공정 일정에 따라 재구매하고자 함

붙임  건설사업관리단 관급자재 계약취소 요청 공문(합의각서 포함) 1부