문서번호	박물관과-2990
결재일자	2021. 3. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		한식문화공간조성추진반장	박물관과장
남광연		이병두	03/16 이성은
협조

『삼청각 별채 리모델링공사』

건설폐기물처리용역 계약변경 검토보고

2021.  3.

문 화 본 부

(박물관과)

『삼청각 별채 리모델링공사』

건설폐기물처리용역 계약변경 검토보고

『삼청각 별채 리모델링공사』추진 중 건설폐기물 처리 물량 증가에 따른 계약변경 요청이 접수되어 이에 대하여 검토하여 보고함

1		사업개요

○ 위    치 : 서울특별시 성북구 대사관로 3외 3필지

○ 규    모 : 지하1층/지상1층, 5개동, 총연면적 1,003㎡

○ 용 역 명 : 삼청각 별채 리모델링공사 건설폐기물처리용역

○ 용 역 사 : ㈜진흥이엔티, ㈜순환골재협회

○ 공사기간 : ’20. 10. 27. ~ ’21. 3. 27.

○ 계약금액 : ********

2		실정보고 내용

○ 관련문서

- 『삼청각 별채 리모델링 공사』철거공사 실정보고 검토보고

[박물관과-245(2021.1.8.)]

- 『삼청각 별채 리모델링 공사』한옥 지붕공사 실정보고 검토보고

[박물관과-814(2021.1.21.)]

○ 관련규정

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제14장 용역계약 일반조건, 제6절 과업내용의 변경과 계약금액 조정

- 건설폐기물 처리용역 과업내용서 4. 설계변경, 6. 기타사항

○ 물량변경 사유

- 압롤박스 규격 변경(16톤⇒24톤)에 따른 단가 변경(절감)

- 별채 내부 철거 물량 증가에 따른 건설폐기물(폐콘크리트, 폐벽돌 등) 물량 증가

- 한옥 지붕 공사 추가에 따른 건설폐기물(폐기와, 폐토석 등) 물량 증가

***************************************************

○ 실정보고 내용 및 공사비 증감

(1)내부 철거물량 증가에 따른 폐기물처리 물량             (단위: 원)

품명	규격	단위	단가	수량			증감액
				당초	변경	증감
********	*****	***	******	*****	******	******	**************
********	*****	***	*******	****	****	*	*
******	***********	***	******	*****	*	********	***************
******	***********	***	******	*	*****	*****	***************
*********							*************

(2)한옥 지붕 공사 추가에 따른 폐기물처리 물량            (단위: 원)

품명	규격	단위	단가	수량			증감액
				당초	변경	증감
********	*****	***	******	*****	******	******	*************
******	***********	***	******	*****	*	********	*************
******	***********	***	******	*	******	******	*************
******	***********	***	******	*	*****	*****	*************
*********							************

(3)폐기물 처리용역 계약변경 금액[(1)+(2)]

구 분	금 액			비고
	당초	변경	증감
******	**********	**********	***************	****
*****	**********	**********	****************
********	**********	**********	**************

○ 소요 예산

- 예산과목 : (균형발전특별회계)박물관 및 미술관 활성화, 박물관 및 미술관 건립지원, 삼청각 리모델링, 시설비및부대비, 시설비

3		감리자 검토의견

○ 현장 폐기물 반출현황 및 변경 수량을 확인한 결과 실제 폐기물 수량이 상이하지 않다고 확인되는 바, 계약변경 후 준공시 최종적으로 계량 증빙을 거쳐 정산처리 하는 것이 타당함

4		처 리 의 견

○ 관련규정 및 현장 여건에 적합한 것으로 판단되어 감리자 검토의견에 따라 상기 보고 내용과 같이 건설폐기물처리용역 계약변경을 시행하고자 함

○ 용역비 증액에 따른 용역기간의 변경은 없으며 계약변경 이후 실처리물량에 따라 정산처리 예정임

붙 임  1. 삼청각 별채 리모델링공사 건설폐기물처리용역 계약변경 요청 1부.

2. 감리자 검토의견서 1부.

3. 변경내역서 1부.  끝.