투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(탄천 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업)

1. 우리부에서 시행중인「탄천 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」공사기간 연장을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 탄천 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

나. 계 약 자 : 백상건설(주)외 2개사

다. 변경사유 : 2처리장 보완공사 및 시운전 용역 준공시까지 연장

라. 변경사항

구 분		당 초	변 경	증․감
공사기간	전체분	‘17.09.01.〜’21.03.31.	‘17.09.01.〜’21.07.31.	증)122일
	3차분	‘19.12.03.〜’21.03.31.	‘19.12.03.〜’21.07.31.	증)122일

마. 예산과목 : 물재생시설과, 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비 및 부대비, 시설비(261-201-01)

붙 임 1. 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 책임건설사업관리단 실정보고(공정표 포함) 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	김재건		치수시설과장	손창익		방재시설부장	03/18 박홍봉
협조자
시행	방재시설부-3404	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02-3708-8775	/전송		/		/	부분공개(5)