문서번호	정수시설과-807
보존기간	년
결재일자	2021. 3. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
윤기영		김기윤	03/22 代이혜진
협 조

2020년 구의아리수정수센터 토목·건축시설물 정비공사 설계변경(2차) 시행계획 보고

2021. 3.

구의아리수정수센터

『2020년 구의아리수정수센터 토목·건축 시설물 정비공사』

설계변경(2차) 시행계획 보고

『2020년 구의아리수정수센터 토목·건축 시설물 정비공사(장기계속공사)』시행중 발생한 계약물량의 증·감 및 신공종 발생 사항에 대하여 설계변경(2차)시행코자 보고 드림.

1		사업현황

○ 공 사 명 : 2020년 구의아리수정수센터 토목·건축 시설물 정비공사

○ 공사기간 : 2020. 4. 7. ~ 2021. 3. 31.

○ 계 약 자 : ㈜금성아트 대표 장윤현

○ 계약금액 : ************

○ 공사규모

- 토공 : 콘크리트포장절단(100~150㎜)외 19종

- 구조물공 : Con’c인력비빔타설(소형구조)외 32종

- 부설공 : 잡철물 제작 설치(간단100%)외 33종

○ 작업지시 현황

- 8차 작업지시 내용 : 송수펌프동 전기실 복층유리 철거 및 설치 외 2건

- 9차 작업지시 내용 : 1정수장 여과지 5지 타일 붙이기 2.7㎡

- 10차 작업지시 내용 : 1정수장 여과지 노후 목재 계단 교체 6개

2		설계변경 사항

□ 주요 변경내용

○ 토공[콘크리트포장절단(100~150㎜) 외 19종]

- 변경내역 없음

○ 구조물공[Con’c인력비빔타설(소형구조) 외 32종]

- 1정수장 여과지 타일 보수에 따른 시공물량 증·감

○ 부설공[잡철물 제작 설치(간단100%)외 39종]

- 송수펌프동 전기실 유리교체에 따른 시공물량 증·감 및 신공종 발생

- 1정수장 여과지 목재계단 파손 교체에 따른 신공종 발생

- 2정수장 여과지 옥상배수관 보수에 따른 시공물량 증·감 및 신공종 발생

- 정문 방호실 창고 처마 물받이 및 배수 홈통 설치에 따른 시공물량 증·감 및 신공종 발생

□ 시공물량 증·감 등에 따른 금액변경

(단위 : 원)

구 분	당초 금액	변경 금액	증·감액
1차수 금액	***********	************	-
2차수 금액	*********	**********	*********
총부기금액[도급액]	***********	***********	*********

3		조치계획

○ 위 변경 내용에 대하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최하고

심의 결과에 따라 설계변경 시행코자 함

○ 설계변경심의 위원회

- 일 시 : 2021. 3. 22(월) 17:00

- 장 소 : 정수시설과 사무실

- 내 용

‣ 설계변경의 타당성

‣ 제경비 산정 및 적용 적정성 여부

‣ 신규공종 단가 및 물량변동의 적정성 여부

- 위 원

구 분	직 급	성 명	비 고
위원장	정수시설과장	김 기 윤
위 원	행정주사	김 동 석
위 원	공업주사	노 성 제
위 원	공업주사	유 일 수
위 원	시설주사	이 용 성

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 심의의견서(양식) 1부.  끝.